2021. 8. 31.

지방도 보행로 정비사업

	(도로관리사업소)

지방도 보행로 정비사업

	사 업 목 적
마을 앞 및 농경지에 접한 지방도의 폭원이 부족한 구간에 보행로를 설치하여 교통사고를 사전예방하고 도민의 안전한 환경 조성 ☞ 도지사 지시사항(2015.9.14 / 실국장 토론회) ※ 정비계획 ; 보행로 115지구, 52.6㎞ / 345억원(추정사업비)

지금까지 추진실적

❍ 대상지 선정기준 및 기본계획(5개년) 수립 : 2016. 12.

❍ 2020년까지 추진실적(보행로 – 85개 지구, 200억원)

2021년 추진

❍ 보행로 정비사업 : 6개 지구, 3,031백만원(이월 471 본 2,000 추경 560)

- 계속지구(2020) : 2개 지구, 679백만원

· 완  료 : 담양 강쟁 등 2개 지구, 679백만원

- 신규지구(2021) : 4개 지구, 2,027백만원

· 예  정 : 완도 덕동 등 4개 지구, 2,027백만원

- 편입토지 보상 및 실시설계 용역 등 : 325백만원

《사업 추진 절차》

기본계획 수립 (‘16. 12.)	⇨	우선순위 실시설계	⇨	편입토지 보상실시	⇨	사업시행	⇨	준 공

앞으로 추진계획

❍ 사업기간 내 적기 추진 및 견실시공을 위한 관리ㆍ감독 철저

❍ 관리·감독 강화로 공정관리 철저히 하여 견실 시공

❍ 2021년 사업 추진 : 담양 강쟁지구 등 6개 지구 / 3,031백만원

참고 1					2021년 지방도 보행로 정비사업 추진현황
(단위 : km, 백만원)
구분	연번	노선		지구명		사업량	총 사업비	2020년 까지	2021년				잔여분	사업기간	비 고
									계	본예산	1회추경	이월
8개 시·군, 11개 지구						8.25	4,407	373	3,031	2,000	560	471	1,003
계속 (2)	1	지887		담양 담양 강쟁		1.1	748	184	564	344		220	-	‵20.11.27. ‵21.05.25.	준공
	2	국지60		무안 무안 성동		0.5	304	189	115	0		115	-	‵20.12.02. ‵21.05.30.	준공
신규 (9)	3	지887		완도 고금 덕동		1.0	933	-	933	700	233	-	-	‵21.05.14. ‵22.05.08.
	4	지887		광양 다압 신원		1.5	737	-	737	470	267	-	-	‵21.04.21. ‵21.10.17.
	5	지840		곡성 죽곡 봉정		0.2	127	-	127	127		-	-	‵21.04.07. ‵21.07.05.	준공
	6	지865		광양 광양 구산		0.6	230	-	230	230		-	-	‵21.05.21. ‵21.11.30.
	7	지887		담양 가사 구산		0.6	121	-	-	-		-	121	2022년시행
	8	지801		영암 시종 월송		0.7	574	-	-	-		-	574	〞
	9	지830		완도 약산 장용		0.8	75	-	-	-		-	75	〞
	10	지815		무안 망운 목동		0.75	86	-	-	-		-	86	〞
	11	지863		여수 화양 서촌		0.5	147	-	-	-		-	147	〞
시군 보상비 재배정							142		142	84		58
2021년 실시설계 용역							41		41			41
감 리 비							137		137	40	60	37
시설부대비							5		5	5