아열대과수 육성지원을 위한 연구기반

통합이전 타당성 조사 및 기본계획수립 용역

의안 번호	2020 -

농업기술원

□ 용역의 필요성

□ 과수연구소 통합이전 시너지를 극대화할 수 있는 입지선정

□ 아열대과수 연구 성과를 극대화할 수 있는 연구기반 조성과 사용자 편의형 청사·연구시설 건립 기본계획 수립

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 아열대과수 육성지원을 위한 연구기반 통합이전 타당성조사 및 기본계획수립 용역(안)

□ 달성목표 : 입지선정, 타당성 조사 및 기본계획 수립

□ 기간/용역비 : 2020. 4. ~ 7.(3개월) / 20백만원

*용역사 선정 계약방법 : 수의계약(*소액 수의, 부가세 미포함)

□ 주요과제

- 입지선정

․ 전문성과 신뢰성을 갖춘 용역사에 위탁

․ 용역사와 협의 후 별도의 입지선정위원회 구성 및 운영

․ 공정한 입지선정을 위한 평가기준 마련(비공개)

․ 최종 후보지 1곳 결정

- 타당성 조사 및 기본계획 수립

․ 아열대과수 연구를 안정적·효과적으로 수행하기 위한 연구기반조성 및 관련 시설 건립 등 기본계획 수립

․ 경제적 파급효과 분석 및 행정절차 설명자료 작성

□ 용역결과 활용계획

□ 통합이전 연구기반조성, 청사·연구시설 건립 기본 방향 및 행정절차 이행 자료로 활용

아열대과수 육성지원을 위한 연구기반

통합이전 타당성 조사 및 기본계획수립 용역

아열대과수 육성지원을 위한 연구기반 통합이전 조성과 관련 청사·연구시설 타당성 조사 및 기본계획수립 용역임

□ 용역의 필요성

□ 과수연구소 통합이전 시너지를 극대화할 수 있는 입지선정

□ 아열대과수 연구 성과를 극대화할 수 있는 연구기반 조성과 사용자 편의형 청사·연구시설 건립 기본계획 수립

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 아열대과수 육성지원을 위한 연구기반 통합이전 타당성조사 및 기본계획수립 용역(안)

□ 달성목표 : 입지선정, 타당성 조사 및 기본계획 수립

□ 용역기간 : 2020. 4. ~ 7.(3개월)

□ 용 역 비 : 20백만원(도비 20)

*용역사 선정 계약방법 : 수의계약(*소액 수의, 부가세 미포함)

□ 용역의 주요내용

〈 연구방향 〉

□ 입지선정 : 적임의 용역사에 위탁하여 별도의 입지선정 위원회를 구성하여 공정하게 심사한 후 최종 결정

□ 기본계획 : 통합이전 입지선정과 청사·연구시설 건립 타당성 검토 및 기본계획 수립

〈 연구범위 〉

□ 공간적 범위 : 평가위원회 심사 후 선정된 부지

- 사업규모 : 총면적 20ha

- 기반조성 : 15.4ha *시험포 구획, 주요 관배수, 펜스, 농로 설치

- 연구시설 건립 : 4.6ha *행정 연구동 등 6종 시설 설치

구 분	합 계	행정 연구동	다목적 교육장	온 실	하우스	저장고 창고	관리사
면적(㎡)	13,880	1,000	660	990	9,900	1,000	330
-	-	1동	1동	3동	10동	1동	1동

※ 입지선정 결과에 따라 사업규모는 조정될 수 있음

□ 시간적 범위 : 기준년도 2020년 / 계획년도 2021년~2023년

□ 내용적 범위

- 과수연구소 통합이전 입지 선정

․ 입지선정위원회를 통한 평가기준 마련 및 복수 후보지 추천

․ 후보지 평가 및 입지선정

- 과수연구소 통합이전 기본계획 수립 및 경제적 파급효과 분석

- 관련 행정절차 기초자료 작성

〈 주요과제 〉

□ 입지선정

- 사업대상 군(해남)을 대상으로 연구소 이전 및 효율적 운영을 위한 최적의 입지선정

- 객관적 실효성을 담보할 수 있는 선정 지표를 활용하여 후보지 및 최종 입지 선정

□ 통합이전 배경과 목적 설정 등 기본계획 수립

- 통합이전 논리 개발

- 단계별 연차별 이전 및 사업목표 수립

- 아열대과수 연구성과를 극대화 할 수 있는 연구기반 조성 및 기본계획 수립

□ 경제적 파급효과 분석

- 과수연구소 통합 이전에 따른 경제적 파급효과 분석

․ 생산유발효과, 부가가치유발효과, 취업유발효과 등

- 중장기 사업로드맵 작성

□ 유사 용역사례(최근 5년간) : 해당없음

□ 용역 추진계획

〈 추진일정 〉

□ 입지선정

- 용역사 선정 및 입지선정 절차 안내          　: 4. 10. ~ 4. 20.

- 입지선정위원회 구성 및 선정 평가기준 마련    : 4. 21. ~ 4. 30.

- 후보지 추천 및 평가위원회 구성, 평가          : 5.  1. ~ 5. 25.

- 선정 완료                                     : 5. 26. ~ 5. 30.

□ 기본계획 수립 및 경제적 파급효과 분석

- 통합이전 시설 및 필요성 등 검토              : 5. 31. ~ 6. 10.

- 경제적 파급효과 분석                          : 6. 11. ~ 6. 20.

- 통합이전 기본계획 수립                        : 6. 21. ~ 7.  9.

□ 활용방안(기대효과)

□ 도내 아열대 과수 산업 육성 지원을 위한 연구시설 통합이전

□ 과수연구소 통합이전 연구기반조성, 청사·연구시설 건립 기본방향 및 향후 행정절차 이행 자료로 활용

용역실명제

농업기술원장	박홍재 (☎330-2641)	과수연구소장	박문영 (☎533-9816)	육종재배 팀 장	조 윤 섭 (☎533-9816)	담당자	박신 (☎533-9816)

연구용역 원가계산서

(단위 : 원)

비목	구분	금액	구성비	비고
인건비	인건비 소계	11,758,820	58.79%
	책임연구원	3,860,230	19.30
	연구원	5,919,950	29.60
	연구보조원	1,978,640	9.89
	보조원	-	-
경비	경비소계	7,100,000	35.50%
	여비	1,500,000	7.50
	유인물비	1,700,000	8.50
	전산처리비	900,000	4.50
	시약·연구용 재료비	-	-
	회의비	2,400,000	12.00
	임차료	-	-
	교통통신비	600,000	3.0
	감가상각비	-	-
일 반 관 리 비 ( )%		1,141,180	5.71	6% 이내
이윤 ( )%		-	-	10%이내
총 원 가		20,000,000		연구용역비

▣ 단가산출내역표

(단위 :  원)

비목	구분	금액	산출근거	비고
인건비	인건비 소계	11,758,820
	책임연구원	3,860,230	․ 3,216,863×6개월×1인×20%=3,860,230
	연 구 원	5,919,950	․ 2,466,647×6개월×2인×20%=5,919,950
	연구보조원	1,978,640	․ 1,648,871×6개월×1인×20%=1,978,640
	보 조 원
경비	경비 소계	7,100,000
	여 비	1,500,000	․ 책임연구원 45,000원*12일*1인 = 540,000원 ․ 연 구 원 40,000원*12일*2인 = 960,000원
	유인물비	1,700,000	․ 착수․중간보고서(5,000원*2회*20부) = 200,000원 ․ 최종보고서 (1식*30부) = 1,500,000원
	전산처리비	900,000	․ 토너 300,000원*2개 = 600,000원 ․ 사무용품 잡비 50,000원*6개월 = 300,000원
	시약·연구용 재료비	-	․ -
	회 의 비	2,400,000	․ 기준위원 100,000원*12인 = 1,200,000원 ․ 평가위원 100,000원*12인 = 1,200,000원
	임 차 료	-	․ -
	교통통신비	600,000	․ 6개월×1대 = 600,000원
	감가상각비		․ -
일 반 관 리 비		1,141,180	․ (인건비 + 경비) × 일반관리비율	6%이내
이윤			․ (인건비+경비+일반관리비)×이윤율	10%이내
총 원 가		20,000,000
부 가 가 치 세
총 계		20,000,000		연구용역비

※ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규)에 의함