정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	공공디자인과	담 당 자 (연 락 처)	김태곤 (286-5331)
정책사업명	녹색디자인 시범거리 조성사업
선정기준	20억 이상 투입되는 사업	사업기간	2013 ~ 2015
주요내용	□ 사업방침 ○ 가로시설물 디자인 개선으로 녹색디자인 거리 표준모델 제시 ○ 지역별 정체성, 예술성, 기능 등이 반영된 거리 조성 ○ 우수사업 발굴, 디자인 품질제고를 위한 전문가 자문 등 반영 □ 사업개요 ○ 사 업 량 : 4개소(순천, 구례, 보성, 해남) ○ 사업기간 : 2013년 ~ 2015년(3년) ○ 사 업 비 : 80억원(도 24, 시군 56, 3년 분할지원) - 1개 소당 20억원(도비 6, 시군 14) ○ 사업내용 : 장기마스터플랜, 단계별 추진계획, 정감 있는 길 조성 등 □ 추진실적 및 향후계획 ○ 대상사업 공모 및 심사, 선정 : 2013. 4. ○ 2013년 사업비 교부결정 : 2013. 7. ○ 실시설계 및 주민 공청회 추진 : 2013. 10.~ ○ 공공디자인 위원회 분야별 전문가 자문 : 2014. 3. ~ ○ 공사 착수 및 사업 추진 : 2014. ~ 2015.