정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	보건한방과	담 당 자 (연 락 처)	오세정 (286-6032)
정책사업명	통합의료센터 건립
선정기준	20억 이상 투입되는 사업	사업기간	2012 ~ 2015
주요내용	□ 사업개요 ○ 위 치 : 장흥군 안양면 로하스타운 內 ○ 사 업 량 : 부지 107,788㎡/연면적 11,480㎡ ○ 사 업 비 : 246억원(국비174, 도비36 군비36) ○ 사업내용 : 통합의학 치유, 연구, 교육 등을 위한 인프라 구축 □ 지금까지 추진현황 ○ 통합의료센터 건립 사업 확정(복지부) : ‘12. 1월 ○ 건립‧운영 업무 협약(도, 장흥군, 연세대세브란스병원) : ‘12. 3월 ○ 기본계획수립 용역 추진(한국보건산업진흥원) : ‘12. 4~11월 ○ 기능 확대 협의 및 총사업비 조정(복지부, 기재부) : ‘13. 1~7월 - 연구 중심에서 치유‧연구‧교육 중심 센터로 기능 확장 - 총 사업비 범위 내 공사비(증2,876백만원) 및 시설부대비(감2,876백만원)조정 ○ 기본‧실시설계용역 PQ 및 계약의뢰(조달청) : ‘13. 8월 ○ 기본‧실시설계용역 착수(간삼건축사) : ‘13. 10월 ○ 경제성 검토(VE) 용역 착수(유탑엔지이어링) : ‘13. 11월 ○ 소규모 환경영향평가 용역 착수((주)다솔) : ‘13. 12월 □ 향후 추진계획 ○ 기본‧실시설계 협의 및 조정(복지부, 기재부) : ‘14. 4~6월 ○ 기본‧실시설계 용역 준공 : ‘14. 6월 ○ 공사 진행 : ‘14.7월~‘15.12월