정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	보건한방과	담 당 자 (연 락 처)	오세정 (286-6032)
정책사업명	천연색소산업화지원센터 건립
선정기준	20억 이상 투입되는 사업	사업기간	2011 ~ 2014
주요내용	□ 사업개요 ○ 위 치 : 나주시 동수동 385-4번지(전남식품산업단지) ○ 건축면적 : 부지면적 10,001㎡/연면적 4,953㎡ ○ 총사업비 : 100억원(국비 50, 도비 15, 시비 35) ○ 사업내용 : 천연색소 연구개발 및 산업화, GMP 시설 구축 운영 등 □ 지금까지 추진현황 ○ 천연색소산업화지원센타 건립 확정(농식품부) : ‘11. 5월 ○ 천연색소산업화 활성화를 위한 포럼 개최 : ‘11. 7월 ○ 기본계획 수립 용역 유찰(2차례) : ‘12. 2월, 3월 ○ 기본계획 수립 용역 추진 : ‘12. 6~9월 ○ 기본‧실시설계 용역 추진 : ‘12.12월~‘14.1월 - 사업방향 변경으로 ‘13. 5~9월 설계 일시 중지 ○ 공사부문 도 계약 심사 : ‘14. 1~3월 □ 앞으로 계획 ○ 건축 공사 발주 및 착공 : ‘14. 5~6월 ○ 산업설비 제작 계약자 선정 및 사업 추진 : ‘14. 6월 ○ 공사 준공 및 개원 준비 : ‘15. 5~6월