정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	보건복지국 보건의료과	② 담당자 (전화번호)	오세정 (286-6033)
③ 정책사업명	천연색소산업화지원센터 건립 지원
④ 선정기준	20억 이상 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2011 ~ 2015
⑥ 주요내용	□ 사업개요 ○ 위 치 : 나주시 동수동 385-4번지(전남식품산업단지) ○ 사 업 량 : 공장, 사무실, 창고 등 기반공사, GMP 공사 ○ 총사업비 : 100억원(국비 50, 도비 15, 시비 35) ○ 사업주체 : 나주시 ○ 사업내용 : 천연색소 연구개발 및 산업화 설비 구축 □ 지금까지의 추진상황 ○ 천연색소산업화지원센타 건립 확정(농식품부) : ‘11. 5월 ○ 천연색소산업화 활성화를 위한 포럼 개최 : ‘11. 7월 ○ 기본계획 수립 용역(새시대산업지식연구원) : ‘12. 6~9월 ○ 기본‧실시설계 용역 : ‘12.12~‘14.1월 ○ 건축‧전기‧소방‧통신 공사업체 선정 : ‘14. 6월 ○ 천연색소추진방향 간담회 개최 : ‘14. 12월 ○ GMP 건축, 전기, 기계 공사 착공 : ‘15. 5월 ○ 재단법인 나주시농업농촌융복합산업진흥재단 설립 : ‘16. 1월 - 천연색소산업화지원센터 운영 기관 □ 앞으로의 추진계획 ○ 천연색소산업화지원센터 최종 준공 : ‘16. 4월