정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	도로교통과	담 당 자 (연 락 처)	진미선 (286-7421
정책사업명	화물자동차 공영차고지 건설사업
선정기준	20억 이상 투입되는 사업	사업기간	2011 ∼ 2016
주요내용	□ 사업목적 ○ 화물물류기지로서의 역할을 할 수 있는 화물차 공영차고지를 적기 확충하여 지역간 균형개발과 깨끗한 교통환경 조성 ○ 운수종사자 사기진작 및 화물운송사업 육성기반 마련 □ 사업개요 ○ 법적근거 : 화물자동차운수사업법 제45조(공영차고지의 설치) ○ 사 업 량 : 2개 지구, 91,194㎡(568대) - 나 주 : 58,136㎡(353대)/나주시 청동 일원 - 광 양 : 33,058㎡(215대)/광양시 옥곡 신금산단내 ○ 사 업 비 : 3,137백만원(국비 2,823, 도비 314) - 나 주 : 1,500백만원(국비 1,350, 도비 150) - 광 양 : 1,637백만원(국비 1,473 도비 164) ※ 재원 : 광특회계(지역개발계정)/국비 90%, 시군비 10% ○ 주요시설 : 차고지, 관리동, 물류창고, 휴게실 등 ※ 관리동 : 사무실, 식당, 샤워실, 체력단련실 등 복지시설 □ 주요 추진상황 및 계획 ❶ 나주시 화물자동차 공영차고지 건설사업(‘11∼’16) ○ 사업계획 확정 : ‘11. 6. ○ 재정 투․융자 심사 : ‘11. 10. ○ 사업타당성 조사 완료 : ‘12. 3. ○ 도시관리계획 및 기본실시설계 용역 :‘13. 2∼’14. 6 ○ 공사착공 : ‘14. 7월(예정) ❷ 광양시 화물자동차 공영차고지 건설사업(‘10∼’15) ○ 재정 투․융자 심사 : ‘08. 11. 7 ○ 사업부지 확정 : ‘10. 9. ○ 사업계획 인가 : ‘11. 12. ○ 재정 투․융자 심사 : ‘11. 10. ○ 실시설계 용역완료 : ‘12. 11. ○ 부지매입 완료 : ‘13. 3. ○ 감리용역 발주 : ‘14. 2. ○ 공사착공 : ‘14. 6월(예정) ○ 운영조례 제정 : ‘14. 7∼8월(예정) ○ 공사준공 : ‘15. 12월(예정)