【번호 2014-100】

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	건설도시국 도로교통과	담 당 자 (연 락 처)	과 장 남창규 행정7 이동미 (286-7422)
정책사업명	화물자동차 공영차고지 건설사업
선정기준	20억 이상 투입되는 사업	사업기간	2011 ∼ 2018
주요내용	□ 사업목적 ○ 화물물류기지로서의 역할을 할 수 있는 화물차 공영차고지를 적기 확충하여 지역간 균형개발과 선진 교통환경 조성 ○ 운수종사자 사기진작 및 화물운송사업 육성기반 마련 □ 사업개요 ○ 법적근거 : 화물자동차운수사업법 제45조(공영차고지의 설치) ○ 사 업 량 : 3개 지구, 154,877㎡(919대) - 나 주 : 54,351㎡(269대) / 나주시 청동 일원 - 목 포 : 63,526㎡(600대) / 목포시 대양산업단지내 - 구 례 : 4,000㎡(50대) /구례읍 백련리 571-1 ○ 사 업 비 : 15,900백만원(국비 12,030, 시군비 3,870) - 나 주 : 1,500백만원(국비 1,350, 시비 150) - 목 포 : 36,000백만원(국비 25,200 시비 10,800) - 구 례 : 1,900백만원(국비 1,330, 군비 570) ※ 재원 : 지특회계(지역개발계정)/국비 70%, 시군비 30% ○ 주요시설 : 차고지, 관리동, 물류창고, 휴게실 등 ※ 관리동 : 사무실, 식당, 샤워실, 체력단련실 등 복지시설

주요내용	□ 주요 추진상황 및 계획 ❶ 나주시 화물자동차 공영차고지 건설사업(‘11∼’17) ○ 사업계획 확정 : ‘11. 6. ○ 재정 투․융자 심사 : ‘11. 10. ○ 사업타당성 조사 완료 : ‘12. 3. ○ 토지 감정평가, 수용재결 심의 및 공탁 :‘14. 7∼’15. 8 ○ 실시설계 작성 및 승인 :‘15. 4∼’15. 9 ○ 공사착공 및 준공 : ‘15. 10~’17. 12월(예정) ❷ 목포시 화물자동차 공영차고지 건설사업(‘16∼’18) ○ ‘16년 지특예산 신청 : ‘15. 2월 ○ 중앙 투자심사 승인(행자부) : ‘15. 5월 ○ 공유재산심의 완료 및 중기지방재정계획 반영 : ‘15. 9월 ○ 부지매입(협약) : ‘16. 4월 ○ 기본 및 실시설계 등 행정절차이행 : ‘16. 9월 ○ 화물자동차 공영주차장 조성 : ‘18. 2월 ❸ 구례군 화물자동차 공영차고지 건설사업(‘16∼’18) ○ 2015. 1 : 공영차고지 조성사업계획 수립 ○ 2015. 1. ~ 4. : 화물공영차고지사업 타당성조사 용역 및 대상지 확정 ○ 2015. 5. : 화물공영차고지사업 국비 신청(지특 70백만원) ○ 2015. 8. ~ 2016. 7. : 군 계획시설 결정고시 ○ 2016. 8. ~ 2016. 11. : 실시설계 용역 ○ 2016. 11. ~ 2017. 3. : 토지감정평가 및 부지매입 ○ 2017. 4. ~ 2017. 9. : 문화재 발굴조사용역 및 도 계약심사 ○ 2017. 10. ~ 2018. 5. : 공사착공 및 사업완료