정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	산단조성과	담 당 자 (연 락 처)	류원식 (760-5442)
정책사업명	해룡산단 진입도로 개설공사
선정기준	20억이상 예산 투입 사업	사업기간	2012 ~ 2015
주요내용	□ 사업개요 ○ 위 치 : 순천시 해룡면 신성리 일원 ○ 사업규모 : 교통광장 1개소(L=2.42㎞, 교량 L=50m) ○ 사 업 비 : 179억원(국비 179) ○ 시 공 사 : (주)대우건설(1공구), 미래도건설(2공구) ○ 감 리 사 : 수성엔지니어링(59%), 동아기술공사(49%) □ 지금까지 사업상황 ○ 해룡산단 진입도로 예산 확정 통보 : ‘12. 1월 ○ 기본 및 실시설계 용역 착수 : ‘12. 5월 ○ 기본 및 실시설계 완료 : ‘12. 12월 ○ 실시계획 인가(GFEZ) : ‘13. 7월 ○ 진입도로 공사 발주(GFEZ) : ’13. 8월 ○ 책임감리 및 공사 착공 : ‘13. 10월 □ 향후 추진계획 ○ 공사 준공 및 시설물 이관 : ‘15. 12월