정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서

기술지원과

담 당 자

(연 락 처)

최성호

(550-0611)

정책사업명

진도지구 전복양식섬 조성사업

선정기준

해양수산 양식분야

최초 공영개발 사업

사업기간

2013 ~ 2014

주요내용

□ 사업개요

○ 사업목적 : 대규모 수출전용 전복양식단지 조성으로, 수산업 기업화 규모화 실현

○ 사 업 명 : 진도지구 전복양식섬 조성사업

○ 위    치 : 전남 진도군 전두 ~ 나리 해역

○ 예 산 액 : 15,000백만원 (국비 50%, 도비 50%)

- ‵13년 4,500백만원 ,  ‵14년 10,500백만원

○ 사 업 량 : 전복양식섬 조성 400ha

- 전복가두리 4,476칸, 해조류양식장 3,315줄, 부대시설(관리사, 관리선, 통신 등)

□ 주요 추진사항

○ 전복양식섬 기본계획 및 실시설계 용역 시행 : ‵13. 5. ~ ‵13. 12.

○ 사업발주 관련 관계부서 업무협의 및 행정절차 이행  : ‵14. 1. ~ ‵14.  3.

○ 전복양식섬 조성사업 시설공사 계약체결(道  회계과) : ‵14. 5.

- 공사기간 ‘14. 6. ~ ‵15. 7.(14개월)

□ 앞으로 추진계획

○ 양식섬 운영관련 사업추진단(공무원, 어업인) 조직 : ‵14. 7.

○ 전복 먹이시설(다시마양식) 운영  : ‵14.  11.

○ 전복가두리 종묘입식(1차 1,500칸) : ‘15. 3월

	< 기 대 효 과 >
• 2017년 11월 : 전복 성패 143톤(57억원) 첫 출하 • 2018년 이후부터 : 매년 143톤(57억원) 규모로 생산예상