전라남도 공고 제2022 - 368호

도시가스 공급시설 공사계획 공고

도시가스사업법 제18조의3 및 같은 법 시행규칙 제30조의 규정에 따라 전라남도 지역별 도시가스 공급시설의 2개년(2022~2023년) 공사계획을 다음과 같이 공고합니다.

2022년  3월  31일

전 라 남 도 지 사

1. 공사 시행기간 : 2022. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.(2년간)

2. 시행자 및 공사대상지역

가. 목포도시가스㈜ : 목포시, 무안군, 영암군, 강진군

나. 대화도시가스㈜ : 여수시

다. 전남도시가스㈜ : 순천시, 광양시, 곡성군, 보성군, 구례군, 고흥군

라. ㈜해양에너지 : 나주시, 화순군, 장성군, 영광군, 해남군, 담양군, 함평군, 장흥군

도시가스 공급시설 공사계획(2022~2023년)

1. 도시가스사별 공급시설 공사계획 (총괄)

(단위 : m, 천원, 개소)

공급사	공 급 시 설	2021년 12월말까지		2022년 계획			2023년 계획
		수 량	수요가수	수 량	투자금액	수요가수	수 량	투자금액	수요가수
합 계	계		518,422		47,960,313	23,078		38,818,713	23,680
	배 관	2,308,161	518,422	122,327	46,691,553	23,078	101,767	37,484,078	23,680
	정압기	288		20	1,268,760		16	1,334,635
목포도시 가스(주)	소계		141,149		18,878,776	6,247		5,366,173	1,673
	배 관	538,798	141,149	45,702	18,377,176	6,247	17,165	5,366,173	1,673
	정압기	73		8	501,600		-	-
대화도시 가스(주)	소계		110,508		6,047,812	4,200		4,912,281	3,187
	배 관	452,772	110,508	22,400	5,927,812	4,200	20,910	4,787,281	3,187
	정압기	60		2	120,000		3	125,000
전남도시 가스(주)	소계		172,641		9,314,814	8,884		11,069,630	12,275
	배 관	550,428	172,641	19,420	8,932,654	8,884	26,201	10,204,630	12,275
	정압기	83		5	382,160		7	865,000
㈜해양 에너지	소계		94,124		13,718,911	3,747		17,470,629	6,545
	배 관	766,163	94,124	34,805	13,453,911	3,747	37,491	17,125,994	6,545
	정압기	72		5	265,000		6	344,635

2. 지역별 배관 설치계획

1) 목포도시가스(주)

가) 2022년도 계획

구분	공 사 구 간	연 장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
지역 합계 72개소		45,702			6,247	18,377,176
목포시 소계 15개소		2,054	목포시	1월~10월	1,091	537,078
1	크림하임~한국아델리움5차	182	석현동	1	212	54,060
2	하늘채~센트럴팰리체2차	35	상동	2	85	8,410
3	서해지방해양경찰청~VTS	423	죽교동	2	1	52,960
4	동명도매어시장~젓갈시장	62	만호동	2	12	10,350
5	박영훈~김남문	90	동명동	3	9	31,710
6	정화빌딩~미밥상	100	북항동	3	10	34,470
7	이혜숙~동인컴퓨터	100	연동	3	11	35,800
8	푸른초장교회~우리사랑요양병원	98	용당2동	3	10	33,630
9	목상고등학교~천일상사	263	용당1동	4	40	72,790
10	2통 영산로307번길~서울약국	95	용당1동	4	10	30,970
11	금호청과마트~김성수	154	용당2동	4	14	48,660
12	용당반점 주변	175	용당2동	5	9	54,120
13	제일풍경채~중해마루힐	150	석현동	5	668	40,500
14	자유시장~호남천막(추가 교량)	96	용해동	10	-	15,648
15	기아모터스~임암교	31	용해동	10	-	13,000
영암군 소계 28개소		18,010	영암군	1월~9월	1,599	6,871,842
1	노블빌~영신아파트	1,078	영암읍	1	80	359,671
2	무등파크맨션~청송드림빌2차	1,664	영암읍	1	90	663,829
3	독천로~계천교	1,805	영암읍	1	-	805,774
4	구림이발관~길촌파크	555	군서면	1	30	193,388
5	이프라임~청송드림빌	658	영암읍	1	35	196,891
6	태화마트~학암회관	353	군서면	2	30	124,163
7	남중로~고령자 주택	105	영암읍	2	150	35,382
8	영암경찰서사거리~월출연립	737	영암읍	2	60	295,361
9	영암실내체육관~그린하이빌	305	영암읍	2	35	123,671
10	KT&G영암지점~삼성프라자	665	영암읍	3	30	203,177
11	연희빌라~그린타운	803	영암읍	3	80	243,510
12	학산지역정압기~청우한울가	1,079	학산면	3	35	436,622
13	영암GS25~제일가축병원	713	영암읍	4	30	218,005
14	영암동사무소~서문로	796	영암읍	4	35	243,259
15	청우한울가~독천초등학교	949	학산면	4	160	356,505
16	화소마을~왕인로	144	영암읍	4	45	42,768
17	영암초교~영암교육지원청	750	영암읍	5	30	222,898
18	옥돌태권도장~하나로마트	752	영암읍	5	25	409,480
19	영암경찰서~영암군청	530	영암읍	5	30	162,802
20	스마트시티 인입 본관	98	영암군	6	-	136,104
21	스마트시티 인입 공급관	98	영암군	6	300
22	농암로~KT영암지점	330	영암읍	6	40	104,817
23	농산물관리원~농공단지	895	영암읍	6	45	377,554
24	삼호중앙초등학교~삼호종합체육관	1,060	삼호읍	6	70	444,102
25	5일시장~영암여자중학교	315	영암읍	7	30	126,227
26	영암여자중학교~영암군민체육센터	225	영암읍	7	1	71,913
27	현대삼호4차~현대빌	28	삼호읍	8	98	7,560
28	대화정공~천일산업	520	삼호읍	9	5	266,409
무안군 소계 11개소		10,140	무안군	1월~9월	3,164	4,800,655
1	형제장식~청계면사무소	34	청계면	1	1	10,203
2	오룡원룸~마광수	65	남악리	1	12	17,024
3	오룡2-2공구~공동41블럭	1,209	오룡리	2	2,000	196,284
4	오룡2-1공구~오룡1-2지역정압기 본관	94	오룡리	2	800	37,829
5	오룡2-1공구~단독27블럭	923	오룡리	3	300	205,469
6	성동길~성동오피스텔	65	무안읍	4	31	16,357
7	항공특화단지	650	현경면	7	20	217,074
8	오룡산로~후정마을회관	1,800	일로읍	7	-	1,074,370
9	후정마을회관~계두길	1,600	일로읍	8	-	1,004,751
10	계두길~일로지역정압기	1,500	일로읍	8	-	1,424,940
11	오룡2단계 사업 잔여	2,200	오룡리	9	-	596,354
강진군 소계 18개소		15,498	강진군	5월~11월	393	6,167,601
1	연지하늘채~강진자비원	630	강진읍	5	30	173,657
2	태평이발관~위성준	110	강진읍	5	8	29,172
3	강진아트홀~강진치과	50	강진읍	5	4	16,819
4	강진아트홀~목리마을	3,650	강진읍	6	71	1,190,783
5	더브이베르가~보은빌	140	강진읍	6	19	38,137
6	강진중앙초등학교~김성훈	510	강진읍	6	19	136,906
7	금릉4길~평동경로당	580	강진읍	7	30	146,432
8	연세의원~LC마트	370	강진읍	7	28	105,160
9	금보석~종합운동장	337	강진읍	8	29	83,655
10	대지빌~게스트하우스	60	강진읍	8	3	16,192
11	KT강진빌딩~강진사랑병원	14	강진읍	8	1	21,681
12	양지바른~LH행복주택	73	강진읍	9	150	25,201
13	강진지구정압기~다산삼거리	1,565	강진읍	10	1	742,687
14	다산삼거리~송계로	1,856	강진읍	10	-	877,030
15	송계로~거목영농법인	1,500	강진읍	10	-	706,046
16	거목영농법인~남상주유소	1,286	강진읍	11	-	590,898
17	남산주유소~성전천	960	강진읍	11	-	435,556
18	성전천~강진산단	1,807	강진읍	11	-	831,589

(단위 : m, 천원, 개소)

나) 2023년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

구분	공 사 구 간	연 장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
지역 합계 10개소		17,165			1,673	5,366,173
목포시 소계 1개소		1,000	목포시	1월~12월	500	300,000
1	목포시 일원	1,000	목포시	1월~12월	500	300,000
영암군 소계 1개소		3,740	영암군	1월~12월	500	1,000,000
1	영암군 일원	3,740	영암군	1월~12월	500	1,000,000
무안군 소계 7개소		8,145	무안군	1월~12월	473	3,066,173
1	일로지역정압기~일로읍사무소	1,265	일로읍	1	210	700,062
2	하나로마트~전남체육고등학교	1,135	일로읍	1	55	490,842
3	일로성당~일로로	660	일로읍	2	40	281,006
4	일로읍사무소~다복2차아파트	975	일로읍	2	35	522,643
5	일로읍사무소~월암교차로	745	일로읍	3	40	375,309
6	일로읍사무소~목포교도소	520	일로읍	4	3	256,311
7	무안군 일원	2,845	무안군	1월~12월	90	440,000
강진군 소계 1개소		4,280	강진군	1월~12월	200	1,000,000
1	강진군 일원	4,280	강진군	1월~12월	200	1,000,000

2) 대화도시가스(주)

가) 2022년도 계획

구분	공 사 구 간	연 장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
여수시 소계 19개소		22,400	여수시	2월~12월	4,200	5,927,812
1	웅천동 캐슬스타 오피스텔	7	웅천동	2월	524	-
2	국동 37-564번지 펜션	19	국동	2월	1	7,269
3	충무동 10통,11통 연결공사	835	충무동	3월	34	210,496
4	문수동 7통 단독주택지역	1,215	문수동	3월	192	185,328
5	동문동 2통~4통 단독주택지역	1,768	종화동	3월	114	330,033
6	돌산대교 매달기공사	600	-	4월	-	1,507,000
7	학동 코아루시티코어 오피스텔	350	학동	4월	280	130,900
8	중앙동 1통~4통 단독주택지역	6,085	중앙동	4월	298	1,201,035
9	수정동 621번지 비즈니스호텔	450	수정동	4월	1	86,625
10	웅천동 롯데캐슬마리나	5	웅천동	4월	550	-
11	신기동 휴스티지오피스텔	10	신기동	5월	142	-
12	한화솔루션(주) HPC공장	600	화치동	6월	1	165,000
13	웅천동 트리마제벨마레	5	웅천동	7월	344	-
14	신월동 경도비전 지에이그린웰 아파트	10	신월동	8월	391	-
15	문수동 4통, 5통, 6통, 8통 단독주택지역	3,500	문수동	8월	340	551,375
16	삼일동 5통, 6통 단독주택지역	4,500	삼일동	9월	120	966,900
17	연등동 311번지 메트하임 아파트	10	연등동	9월	269	-
18	중앙동 11통 지역(교동오거리)	2,300	중앙동	11월	100	455,620
19	소규모 공사	131	-	연중	499	130,231

(단위 : m, 천원, 개소)

나) 2023년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

구분	공 사 구 간	연 장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
여수시 소계 14개소		20,910	여수시	1월~12월	3,187	4,787,281
1	서교동 중해마루 및 행복주택아파트	450	서교동	1월	550	93,500
2	봉계동 산129번지 아파트	350	봉계동	1월	115	86,763
3	대교동 13통,14통 지역	2,500	봉산동 봉강동	2월	139	536,938
4	미평동 234번지 해광샹그릴라아파트	10	미평동	2월	282	17,765
5	삼일동 3통,4통 지역	4,500	삼일동	3월	100	1,069,750
6	소호동 945 오션 테라스	400	소호동	4월	162	96,635
7	광림동 5통,7통 지역	2,700	광무동	4월	111	606,788
8	신기동 81-1 대광로제앙	300	신기동	5월	363	135,053
9	삼일동 7통,8통 지역	4,000	삼일동	7월	107	938,438
10	여서동 1통 대치마을	1,500	여서동	8월	52	343,750
11	광무동 504 번지 아델리움아파트	1,500	광무동	9월	274	167,145
12	광림동 1통 지역	2,000	광무동	12월	60	469,696
13	수정동 235 블루써밋	500	수정동	12월	272	60,060
14	소규모 공사	200	-	연중	600	165,000

3) 전남도시가스(주)

가) 2022년도 계획

구분	공 사 구 간	연 장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
지역 합계 51개소		19,420			8,884	8,932,654
순천시 소계 20개소		8,685	순천시	1월~12월	4,055	4,431,341
1	저전동 오네뜨트윈시티	2	저전동	6월	88	4,602
2	서면 선평리 한화포레나	295	서면	10월	615	133,861
3	조곡동 e-편한세상 2차	750	조곡동	10월	634	347,480
4	용당동 한양수자인	40	용당동	11월	1,254	51,106
5	가곡동 대광로제비앙	5	가곡동	7월	729	8,256
6	덕암동 일대	207	덕암동	4월	17	60,991
7	가곡동 일대	123	가곡동	5월	22	42,782
8	해룡면 일대	1,045	해룡면	5월	43	298,271
9	옥천동 일대	825	옥천동	10월	65	311,319
10	매곡동 일대	565	매곡동	10월	20	188,365
11	순천만정원 식물원	483	풍덕동	9월	3	236,479
12	가곡동 대광로제비앙 In-Out 배관	170	가곡동	7월	-	178,850
13	PE 중압배관교체(노룻재~왕조우체국)	1,835	왕조동	8월	-	1,214,769
14	조곡동 순천교~조곡교 Loop	570	조곡동	5월	-	275,940
15	조례동 수산시장~사랑치과 Loop	212	조례동	3월	-	99,242
16	조례주공2차~봉화오피스텔 Loop	444	조례동	3월	-	307,386
17	연향동 말단 압력보강	70	연향동	3월	-	47,923
18	장천동 하수관통배관 이설	8	장천동	9월	-	28,207
19	노후밸브교체 및 철거	-	순천시	연중	-	95,512
20	기타 공사구간	1,036	순천시	연중	565	500,000
광양시 소계 15개소		6,386	광양시	1월~12월	4,311	2,881,603
1	광양읍 목성지구 부영주택(A-1/2)	943	광양읍	3월	1,494	354,907
2	성황동 성황도이지구 광양센트럴자이	50	성황동	6월	706	39,155
3	중동 수하임더스틸 2차	170	중동	8월	176	62,544
4	마동 스마트시트 1차/2차	473	마동	9월	350	234,080
5	마동 동문굿모닝힐	18	마동	11월	1,116	22,611
6	구산리 일대	131	광양읍	5월	20	40,661
7	성황동 일대	703	성황동	5월	26	223,365
8	목성리 일대	1,543	광양읍	6월	65	427,271
9	성황도이지구 수영장 및 체육관	365	성황동	3월	5	126,179
10	중동 수산물유통종합센터	274	중동	3월	12	103,417
11	중동 가족센터	84	중동	5월	2	32,356
12	중마동 성호A~길호대교 Loop	980	중마동	6월	-	797,160
13	광양읍 칠성리 연결공사	30	광양읍	3월	-	30,660
14	노후밸브교체 및 철거	-	광양시	연중	-	87,237
15	기타 공사구간	622	광양시	연중	339	300,000
곡성군 소계 4개소		1,199	곡성군	1월~12월	107	393,555
1	읍내리 3구 일대	222	곡성읍	5월	10	69,040
2	읍내리 교육지원청 주변	179	곡성읍	6월	8	54,040
3	읍내리 곡성등기소 주변	694	곡성읍	9월	32	220,475
4	기타 공사구간	104	곡성읍	연중	57	50,000
구례군 소계 5개소		1,031	구례군	1월~12월	187	438,714
1	봉동리 구례골든캐슬아파트	55	구례읍	7월	49	49,894
2	봉동리 일대	191	구례읍	4월	36	131,512
3	봉남리 일대	393	구례읍	5월	25	116,806
4	봉동리 구례경찰서 주변	288	구례읍	6월	20	90,502
5	기타 공사구간	104	구례읍	연중	57	50,000
보성군 소계 3개소		1,072	보성군	1월~12월	87	376,363
1	벌교리 일대	117	벌교읍	4월	10	35,408
2	척령리 일대	851	벌교읍	10월	20	290,955
3	기타 공사구간	104	벌교읍	연중	57	50,000
고흥군 소계 4개소		1,047	고흥군	1월~12월	137	411,078
1	호형리 일대	196	고흥읍	3월	40	79,741
2	남계리 스카이캐슬 주변	272	고흥읍	5월	20	115,943
3	남계리 고흥시장 주변	475	고흥읍	9월	20	165,394
4	기타 공사구간	104	고흥읍	연중	57	50,000

(단위 : m, 천원, 개소)

나) 2023년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

구분	공 사 구 간	연 장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
지역 합계 41개소		26,201			12,275	10,204,630
순천시 소계 15개소		8,266	순천시	1월~12월	4,035	2,757,025
1	조례동 골드클래스 3차	650	조례동	7월	475	198,900
2	해룡면 마이다스 B&C	300	해룡면	5월	352	91,800
3	조례2지구 산 15-1 일원	31	조례동	11월	1,027	16,179
4	연향동 일대	402	연향동	8월	14	100,394
5	중앙로 의료원 주변	687	매곡동	8월	48	157,237
6	왕지 2지구(1년차)	3,450	왕지동	10월	1,024	845,000
7	포스코리튬솔루션	350	율촌산단	7월	1	157,500
8	현대스틸산업	20	율촌산단	10월	1	9,000
9	율촌산업단지	150	율촌산단	6월	1	60,000
10	기타 공사구간	890	순천시	6월	527	326,500
11	신대 중흥2차A~매안초교 LOOP	300	해룡면	연중	-	154,215
12	미사용분기배관 개선	-	순-시	연중	-	68,400
13	분기배관철거/연결	-	순천시	연중	-	68,400
14	노후밸브교체 및 철거	-	순천시	연중	-	3,500
15	기타 공사구간	1,036	순천시	연중	565	500,000
광양시 소계 13개소		14,646	광양시	1월~12월	7,439	6,437,596
1	광양읍 목성지구 부영주택(A-3/B-1/2)	301	광양읍	7월	2,851	158,115
2	광양읍 세미존 서희스타힐스	1,500	광양읍	6월	886	687,000
3	광영동 한라비발디	490	광영동	7월	335	201,080
4	황금지구 대우푸르지오	15	황금동	10월	565	6,705
5	용강지구 광양의봄	300	광양읍	8월	1,358	137,400
6	칠성리 일대	258	광양읍	5월	34	61,800
7	황금지구(1년차)	7,900	황금동	8월	1,000	1,915,560
8	마동택지 1차	200	마동	10월	70	82,400
9	세풍산업단지	200	세풍산단	6월	1	80,000
10	기타 공사구간	622	광양시	6월	339	300,000
11	길호대교~제철1문 Loop	2,740	중마동	연중	-	2,489,000
12	노후밸브교체 및 철거	-	광양시	연중	-	250,950
13	단독조정기 철거	120	광양시	연중	-	67,586
곡성군 소계 3개소		605	곡성군	1월~12월	147	244,524
1	묘천리 LH 공동주택	150	곡성읍	8월	120	110,315
2	교촌리 일대	330	곡성읍	5월	17	99,209
3	기타 공사구간	125	곡성읍	연중	10	35,000
보성군 소계 2개소		359	보성군	1월~12월	62	111,463
1	회정리 일대	234	벌교읍	7월	52	76,463
2	기타 공사구간	125	벌교읍	6월	10	35,000
구례군 소계 3개소		944	구례군	1월~12월	301	291,303
1	백련리 공동주택	150	구례읍	8월	247	60,236
2	봉동리 일대	669	구례읍	3월	44	196,067
3	기타 공사구간	125	구례읍	연중	10	35,000
고흥군 소계 5개소		1,381	고흥군	1월~12월	291	362,719
1	고흥택지 LH	202	고흥읍	11월	202	20,000
2	남계리 일대	537	고흥읍	8월	28	153,247
3	등암리 일대	317	고흥읍	9월	39	100,432
4	행정리 일대	200	고흥읍	8월	12	54,040
5	기타 공사구간	125	고흥읍	연중	10	35,000

4) (주)해양에너지

가) 2022년도 계획

구분	공 사 구 간	연 장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
지역 합계 42개소		34,805			3,747	13,453,911
화순군 소계 7개소		5,198	화순군	2월~12월	288	1,742,369
1	감도리 일대	71	감도리	9월	3	45,459
2	광덕리 일대	50	광덕리	6월	6	15,000
3	내평리 일대	130	내평리	6월	2	48,855
4	대리 일대	508	대리	6월	12	152,221
5	백암리 일대	3,580	백암리	8월	100	1,235,389
6	잠정리 일대	145	잠정리	6월	2	58,784
7	기타지역 및 소구간	714	화순군 내	2~12월	163	186,661
나주시 소계 12개소		9,641	나주시	2월~12월	1,992	4,365,860
1	금성동 일대	3,236	금성동	10월	112	1,021,387
2	나주시 일대	500	나주시	11월	20	93,500
3	덕산리 일대	95	덕산리	9월	2	27,868
4	동수동 일대	30	동수동	4월	2	23,680
5	석전리 일대	450	석전리	11월	1,480	195,750
6	빛가람동 일대	40	빛가람동	12월	1	20,000
7	신도리 일대	13	신도리	6월	1	25,455
8	운곡동 일대	6	운곡동	6월	1	10,152
9	월태리, 동곡리 일대	4,361	월태리, 동곡리	10월	122	1,699,639
10	이창동 일대	120	이창동	11월	150	83,331
11	죽림동 일대	80	죽림동	8월	1	32,000
12	기타지역 및 소구간	710	나주시 내	2~12월	100	1,133,098
장성군 소계 5개소		5,094	장성군	2월~12월	227	1,924,368
1	구림리 일대	1,878	구림리	6월	68	660,320
2	삼태리 일대	1,994	삼태리	11월	46	692,702
3	영천리 일대	50	영천리	6월	46	20,000
4	주산리 일대	30	주산리	6월	11	12,000
5	기타지역 및 소구간	1,142	장성군 내	2~12월	56	539,346
영광군 소계 4개소		776	영광군	2월~12월	239	388,842
1	단주리 일대	50	단주리	11월	198	20,000
2	송죽리 일대	40	송죽리	11월	2	28,342
3	영광읍 일대	490	영광읍	11월	11	252,500
4	기타지역 및 소구간	196	영광군 내	2~12월	28	88,000
해남군 소계 2개소		506	해남군	2월~12월	58	225,356
1	해남읍 일대	300	해남읍	2~12월	30	151,785
2	기타지역 및 소구간	206	해남군 내	2~12월	28	73,571
담양군 소계 3개소		5,558	담양군	2월~12월	354	1,804,998
1	삼만리 일대	20	삼만리	10월	103	829,055
2	양각리 일대	4,748	양각리	12월	184	781,742
3	기타지역 및 소구간	790	담양군 내	2~12월	67	194,201
함평군 소계 6개소		4,887	함평군	2월~12월	347	1,900,146
1	기각리 일대	582	기각리	6월	170	188,945
2	내교리 일대	1,037	내교리	6월	42	330,818
3	마산리 일대	20	마산리	10월	1	14,171
4	함평리 일대	80	함평리	11월	40	28,571
5	함평읍 일대	3,104	함평읍	2~12월	78	1,314,785
6	기타지역 및 소구간	64	함평군 내	2~12월	16	22,856
장흥군 소계 3개소		3,145	장흥군	2월~12월	242	1,101,972
1	건산리 일대	200	건산리	10월	15	68,000
2	원도리 일대	2,617	원도리	9월	143	989,972
3	기타지역 및 소구간	328	장흥군 내	2~12월	84	44,000

(단위 : m, 천원, 개소)

나) 2023년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

구분		공 사 구 간	연 장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
지역 합계 43개소			37,491			6,545	17,125,994
화순군 소계 5개소			3,646	화순군	2월~12월	1,162	1,537,413
1		감도리 일대	667	감도리	12월	10	320,354
2		화순읍 일대	275	화순읍	6월	928	133,814
3		동면 일대	1,020	동면	7월	31	469,757
4		능주면 일대	950	능주면	8월	30	439,223
5		기타지역 및 소구간	734	화순군 내	2~12월	163	174,265
나주시 소계 9개소			11,554	나주시	2월~12월	1,413	6,004,578
1		동수동 일대	20	동수동	6월	1	7,446
2		빛가람동 일대	50	빛가람동	11월	760	36,722
3		운곡동 일대	3,360	운곡동	10월	30	1,678,864
4		산포면 일대	6,464	산포면	10월	166	2,516,202
5		나주시내 일대	500	나주시내	11월	20	178,673
6		석전리 일대	150	석전리	10월	314	94,426
7		왕곡면 일대	20	왕곡면	6월	1	7,446
8		교원리 일대	35	교원리	6월	1	13,030
9		기타지역 및 소구간	955	나주시 내	2~12월	120	1,471,769
장성군 소계 8개소			9,105	장성군	2월~12월	1,393	3,522,151
1	영천리 일대		135	영천리	6월	1,041	89,412
2	월평리 일대		2,273	월평리	12월	31	867,208
3	학성리 일대		5,355	학성리	10월	3	1,982,258
4	상도리 일대		900	상도리	5월	2	289,686
5	삼계리 일대		200	삼계리	5월	1	91,571
6	기산리 일대		15	기산리	6월	117	60,383
7	수산리 일대		20	수산리	6월	150	8,629
8	기타지역 및 소구간		207	장성군 내	2~12월	48	133,004
영광군 소계 7개소			3,068	영광군	2월~12월	620	1,282,308
1	단주리 일대		80	단주리	10월	300	43,879
2	송죽리 일대		40	송죽리	10월	2	25,078
3	학정리 일대		630	학정리	9월	30	226,092
4	녹사리 일대		700	녹사리	9월	14	303,800
5	마읍리 일대		822	마읍리	6월	226	361,460
6	신하리 일대		600	신하리	6월	20	215,567
7	기타지역 및 소구간		196	영광군 내	2~12월	28	106,432
해남군 소계 1개소			256	해남군	2월~12월	44	139,844
1	기타지역 및 소구간		256	해남군 내	2~12월	44	139,844
담양군 소계 4개소			4,460	담양군	2월~12월	1,420	2,382,668
1	삼만리 일대		20	삼만리	9월	1	9,893
2	고서면 일대		3,540	고서면	9월	1,279	1,916,558
3	담양읍 일대		50	담양읍	9월	20	24,094
4	기타지역 및 소구간		850	담양군 내	2~12월	120	432,123
함평군 소계 4개소			3,696	함평군	2월~12월	291	1,502,983
1	기각리 일대		800	기각리	6월	180	300,824
2	마산리 일대		20	마산리	10월	1	9,912
3	사거리 일대		2,796	사거리	10월	90	1,148,807
4	기타지역 및 소구간		80	함평군 내	2~12월	20	43,440
장흥군 소계 5개소			1,706	장흥군	2월~12월	202	754,049
1	건산리 일대		200	건산리	10월	15	79,511
2	예양리 일대		300	예양리	8월	20	130,359
3	원도리 일대		800	원도리	9월	80	347,246
4	해당리 일대		28	해당리	6월	2	15,415
5	기타지역 및 소구간		378	장흥군 내	2~12월	85	181,518

3. 지역별 정압기 설치계획

1) 목포도시가스

가) 2022년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

시·군	설 치 지 역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		8		1월~11월	-	501,600
목포시	목포시(웰빙)	1	목포	1월	-	62,700
영암군	영암군(영암읍, 학산면, 군서면, 스마트시티)	4	영암	3월~6월	-	250,800
무안군	무안군(오룡지구, 일로읍)	2	무안	3월~9월	-	125,400
강진군	강진군(목리마을)	1	강진	11월	-	62,700

나) 2023년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

시·군	설 치 지 역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		-	-	-	-	-
목포시	-	-	-	-	-	-
영암군	-	-	-	-	-	-
무안군	-	-	-	-	-	-
강진군	-	-	-	-	-	-

2) 대화도시가스

가) 2022년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

시·군	설 치 지 역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		2		9월	-	120,000
여수시	삼일동	1	삼일동	9월	-	60,000
여수시	연등동	1	연등동	9월	-	60,000

나) 2023년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

시·군	설 치 지 역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		3		1월~7월	-	125,000
여수시	봉계동	1	봉계동	1월	-	5,000
여수시	신기동	1	신기동	5월	-	60,000
여수시	삼일동	1	삼일동	7월	-	60,000

3) 전남도시가스

가) 2022년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

시·군	설 치 지 역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		5	-	3월~10월	-	382,160
광양시	신규설치	1	-	3월	-	81,692
	노후시설 개선/철거	-	-	-	-	-
순천시	신규설치	3	-	7~10월	-	263,676
	노후시설 개선	1	-	9월	-	36,792

나) 2023년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

시·군	설 치 지 역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		7	-	5월~10월	-	865,000
광양시	신규설치	4	-	5~10월	-	485,000
	노후시설 개선/철거	-	-	-	-	-
순천시	신규설치	1	-	7월	-	120,000
	노후시설 개선	2	-	9월	-	260,000

4) (주)해양에너지

가) 2022년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

시·군	설 치 지 역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		5		6월~12월	-	265,000
나주시	월태리, 동곡리	1	월태·동곡리	10월	-	53,000
나주시	금천면	1	석전리	11월	-	53,000
장성군	동화면	1	구림리	6월	-	53,000
담양군	담양읍	1	양각리	12월	-	53,000
담양군	담양읍	1	삼만리	10월	-	53,000

나) 2023년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

시·군	설 치 지 역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		6		6월~10월	-	344,635
화순군	능주면	1	능주면	8월	-	54,927
나주시	산포면	1	산포면	10월	-	54,927
장성군	장성읍	1	영천리	6월	-	54,927
장성군	삼서면	1	학성리	10월	-	70,000
담양군	고서면	1	고서면	9월	-	54,927
함평군	학교면	1	사거리	6월	-	54,927