2014년  항만개발사업 추진현황

	(해양항만과)

완도항 어선정박시설 축조공사

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 완도항 어선정박시설 축조공사

ㅇ 위    치 : 전남 완도군 완도읍 군내리 일원

ㅇ 사 업 량 : 방파제 364.5m, 물양장 290m, 호안 633.5m , 진입도로 591m 등

ㅇ 사업기간 : 2009. 5.20 ~ 2014. 6.20

ㅇ 시 공 사 : ㈜대아건설, ㈜한양

ㅇ 감 리 사 : ㈜세일종합기술공사, ㈜대영엔지니어링

ㅇ 총공사비 : 27,109백만원

ㅇ 계약방법 : 일반경쟁

ㅇ 사업효과 : 도서지방의 관광기능을 확보할 수 있는 지원 항만개발

□ 추진경위 및 현황

ㅇ 완도항 외곽시설․안벽 기본 및 실시설계용역 : 2003. 4. ~ 2004. 8

ㅇ 완도항 남방파제 축조공사 시행 : 2004. 11. ~ 2006. 11.

ㅇ 완도항 어선정박시설 축조공사 착공(총괄 및 1차분) : 2009. 5. 20.

ㅇ 완도항 어선정박시설 축조공사 착공(5차분) : 2013. 3.  4.

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	전체	2012까지	2013집행	2014계획	2015이후
총사업비	29,496	20,750	6,314	2,432	0
공사비	27,356	18,968	6,083	2,305	-
설계비	332	265	37	30	-
감리비	1,766	1,490	179	97	-
부대비	42	27	15	-	-

□ 참고사항

ㅇ 2014 완도국제해조류박람회의 성공적 개최를 위해 완도군과 협조하여 사업 추진

□ 계획평면도

□ 표준단면도

신마항 건설공사

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 신마항 건설공사

ㅇ 위    치 : 전남 강진군 마량면 마량리 전면해상

ㅇ 사 업 량 : 도제 200m, 방파제 155m, 접안시설 180m

ㅇ 사업기간 : 2010.12.21~2015.11.24

ㅇ 시 공 사 : GS건설(주)외 3개사

ㅇ 감 리 사 : (주)건일엔지니어링외 1개사

ㅇ 총공사비 : 22,931백만원

ㅇ 계약방법 : 적격

ㅇ 사업효과 : 제주항 화물 물동량 수송 및 관리부두 신설

□ 추진경위 및 현황

ㅇ 연안항으로 지정 : ‘98. 02

ㅇ 제1차 항만기본계획 고시 (신마항 외 3) : ‘01. 12

ㅇ 제2차(2002~2011) 전국항만 기본계획(연안항) 고시 : ‘02. 12

ㅇ 신마항 개발 기본 및 실시설계 용역 : ‘03. 09

ㅇ 제2차(2007~2011) 전국항만 기본계획 수정계획(연안항)  고시 : ‘07. 12

ㅇ 신마항 건설공사 실시설계(보완) 용역 : ‘09. 10

ㅇ 공사착공 : ‘10.12.21

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	전체	2012까지	2013집행	2014계획	2015이후
총사업비	27,139	9,271	6,731	4,121	7,016
공사비	22,931	6,544	6,300	3,897	6,190
설계비	2,382	2,100	79	100	103
감리비	1,756	601	340	114	701
부대비	70	26	12	10	22

□ 참고사항

○ 어업보상 및 개발에 따른 피해우려 민원발생으로 공사 추진 지연

- 강진군 : 전복 종묘 배양장 보상 민원

- 장흥군 : 어류양식장(넙치)피해 및 매생이 양식장 피해우려 민원

- 완도군 : 고금, 약산 어업인 항로 협소 및 생태계변화 등 피해우려 민원

□ 계획평면도

□ 표준단면도

송공항 북방파제 축조공사

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 송공항 북방파제 축조공사

ㅇ 위    치 : 전남 신안군 압해면 송공리 전면 해상

ㅇ 사 업 량 : 방파제 200m

ㅇ 사업기간 : 2011.12.28 ~ 2014. 5.19

ㅇ 시 공 사 : (주)해송종합건설

ㅇ 총공사비 : 3,840백만원

ㅇ 계약방법 : 일반경쟁

ㅇ 사업효과 : 방파제 축조로 항내 항만 기능을 효율적이고 경제적으로 개발 및 차도선부두와 물양장을 이용하는 주민들과 관광객의 편의 증진

□ 추진경위 및 현황

ㅇ 송공항 정비 기본 및 실시설계용역 착수 : ‘10. 6.17

ㅇ 제3차 전국 항만기본계획 고시 : ‘11. 7.25

ㅇ 송공항 북방파제 축조공사 해역이용협의 : ‘11.10.26

ㅇ 송공항 북방파제 축조공사 착공(총괄 및 1차분) : ‘11.12.28

ㅇ 송공항 북방파제 축조공사 착공(2차분) : ‘12.12.28

ㅇ 송공항 북방파제 축조공사 준공(1차분) : ‘13.12.24

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	전체	2012까지	2013집행	2014계획	2015이후
총사업비	3,948	3,948	-	-	-
공사비	3,948	3,948	-	-	-
설계비	-	-	-	-	-
감리비	-	-	-	-	-
부대비	8	8	-	-	-

□ 참고사항

ㅇ 주민 건의사항인 어업피해 조사용역 실시 등 민원해소 추진

□ 계획평면도

□ 표준단면도

갈두항 건설공사

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 갈두항 건설공사

ㅇ 위    치 : 전남 해남군 송지면 송호리 전면 해상

ㅇ 사 업 량 : 해수유통구 44m, 차도선부두 137m, 콘크리트포장 6,357㎡, 호안 72m

ㅇ 사업기간 : 2012.10.30 ~ 2014. 9.21

ㅇ 시 공 사 : 에스엠건설(주)

ㅇ 총공사비 : 5,092백만원

ㅇ 계약방법 : 일반경쟁

ㅇ 사업효과 : 해안 관광객 증가와 도서주민의 빈번한 이용으로 혼잡한 항내에 물양장과 호안 등 시설규모의 확장을 통해 해상 관광객 수송 등 해상물동량의 원활한 처리로 갈두항을 이용하는 주민들과 관광객 편의 증진

□ 추진경위 및 현황

ㅇ 갈두항 정비 기본 및 실시설계용역 착수 : ‘10. 6.17

ㅇ 제3차 전국 항만기본계획 고시 : ‘11. 7.25

ㅇ 항만기본계획 변경 국토부 협의(기본계획 변경 요청) : ‘11.11.24

ㅇ 갈두항 정비공사 실시설계용역 최종보고회 : ‘11.12.22

ㅇ 갈두항 건설공사 착공(총괄 및 1차분) : ‘12.10.30

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	전체	2012까지	2013집행	2014계획	2015이후
총사업비	6,218	2,005	3,313	0	900
공사비	6,200	2,000	3,300	-	900
설계비	-	-	-	-	-
감리비	-	-	-	-	-
부대비	18	5	13	-	-

□ 참고사항

ㅇ 사업대상지 차도선부두 지반개량시 인근 어업피해 방생이 우려되어 지반개량공법 재검토

□ 계획평면도

□ 표준단면도

홍도항 동방파제 축조공사

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 홍도항동방파제 축조공사

ㅇ 위    치 : 전남 신안군 흑산면 홍도리 홍도항 해상

ㅇ 사 업 량 : 방파제 150m

ㅇ 사업기간 : 2013.12.30 ~ 2016. 9.14

ㅇ 시 공 사 : ㈜한양 등 5개사

ㅇ 감 리 사 : 대영엔지니어링 등 2개사

ㅇ 총공사비 : 85,934백만원

ㅇ 계약방법 : 설계·시공일괄입찰

ㅇ 사업효과 : 홍도항의 정온수역을 효율적으로 확보

□ 추진경위 및 현황

ㅇ 연안항 지정          : ‘93. 11

ㅇ 홍도항 기본계획 반영 : ‘11. 7

ㅇ 기초자료 용역 시행   : ‘11. 6.20~’12.12.22

ㅇ 동방파제 축조공사 착공(총괄 및 1차분) : ‘13.12.30

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	전체	2012까지	2013집행	2014계획	2015이후
총사업비	97,012	1,500	1,571	14,660	79,281
공 사 비	85,934		1,280	12,500	72,154
설 계 비	4,835	1,500		1,832	1,503
감 리 비	6,013		261	300	5,452
부 대 비	230	-	30	28	172

□ 참고사항

ㅇ 해상교통안전진단 결과 통항 안전기준 미충족으로 3차 항만기본계획 변경 필요

□ 계획평면도

□ 표준단면도

홍도항 재해취약지구 정비공사

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 홍도항 재해취약지구 정비공사

ㅇ 위    치 : 전남 신안군 흑산면 홍도리 홍도항 해상

ㅇ 사 업 량 : 방파제 200m보강

ㅇ 사업기간 : 2013. 4. 8 ~ 2015. 9. 24

ㅇ 시 공 사 : 동부건설(주)외 2개사

ㅇ 감 리 사 : (주)서영엔진니어링 외 1개사

ㅇ 총공사비 : 16,221백만원

ㅇ 계약방법 : 일반경쟁입찰

ㅇ 사업효과 : 기존단면의 안정성을 확보하여 재해예방

□ 추진경위 및 현황

ㅇ 연안항 지정          : ‘93. 11

ㅇ 홍도항 기본계획 반영 : ‘11. 7

ㅇ 실시설계 용역 시행   : ‘11.10.31~’12.12.14

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	전체	2012까지	2013집행	2014계획	2015이후
총사업비	17,622	4,252	3,300	3,180	6,890
공 사 비	16,221	3,559	3,000	3,000	6,662
설 계 비	518	518			-
감 리 비	883	175	300	180	228
부 대 비

□ 참고사항

ㅇ 없음

□ 계획평면도

□ 표준단면도

완도항 재해취약지구 정비공사

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 완도항 재해취약지구 정비공사

ㅇ 위    치 : 전남 완도군 완도읍 군내리 완도항 해상

ㅇ 사 업 량 : 방파제 250m보강

ㅇ 사업기간 : 2013. 2. 4 ~ 2015. 7.23

ㅇ 시 공 사 : 화성산업(주)외 1개사

ㅇ 감 리 사 : (주)혜인이엔씨 외 1개사

ㅇ 총공사비 :  10,339백만원

ㅇ 계약방법 : 일반경쟁입찰

ㅇ 사업효과 : 기존단면의 안정성을 확보하여 재해예방

□ 추진경위 및 현황

ㅇ 완도항 기본계획 반영 : ‘11. 7

ㅇ 실시설계 용역 시행   : ‘11.10.14 ~ ’12. 6. 4

ㅇ 완도항 재해취약지구 정비공사 착공(총괄 및 1차분) : ‘13. 2. 4

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	전체	2012까지	2013집행	2014계획	2015이후
총사업비	11,279	3,227	3,250	3,135	1,712
공 사 비	10,339	2,746	3,000	3,000	1,593
설 계 비	331	331			-
감 리 비	609	150	250	135	119
부 대 비

□ 참고사항

ㅇ 없음

□ 계획평면도

□ 표준단면도