2020년도

완도항 유선 부두 축조공사

기본 및 실시설계용역 설계서

2020년 월 일 설계		조 사 자	설 계 자	심 사 자		팀 장	과 장
2020년도 완도항 유선 부두 축조공사 기본 및 실시설계용역 설계서
◎ 과업내용 :	지형 및 수심측량 : 2.05km 지반조사 : 5공 일반해역이용협의 : 1식 기본 및 실시설계 용역 : 1식
전라남도

목      차

Ⅰ. 설 계 설 명 서 ................................................................................................................................

Ⅱ. 과 업 지 시 서 ................................................................................................................................

1. 일반사항 ..................................................................................................................................................

2. 기본 및 실시설계 ................................................................................................................................

3. 일반해역이용협의 ................................................................................................................................

4. 성과품 작성 ............................................................................................................................................

Ⅲ. 예정공정표 .............................................................................................................................................................

Ⅳ. 설계예산내역서 ...................................................................................................................................................

Ⅰ. 설 계 설 명 서

1. 과  업  명 : 완도항 유선 부두 건설 기본 및 실시설계용역

2. 과 업 위 치 : 전라남도 완도군 완도항 완도읍 군내리 일원

3. 과 업 목 적 : 완도항은 어선정박지 포화로 인하여 소형선박 접안을 위한 추가적인 시설 설치를 위하여 최적의 평면배치계획을 수립과 경제적이고 안전하게 건설 할 수 있도록 기본 및 실시설계를 수행하여 합리적 개발방안 도출 하는 데 그 목적이 있음.

4. 과 업 개 요 : 기본 및 실시설계 1식

- 지형 및 수심측량,  지반조사 및 토질시험, 해역이용협의, 등 각종 설계도서 작성

5. 과업수행기간 : 착수일로부터 8개월

Ⅱ. 과 업 지 시 서

1. 일반사항

1.1 과업명

완도항 유선 부두 건설 기본 및 실시설계용역

1.2 과업의 목적

본 과업은 완도항의 소형선박 계류시설 포화로 인하여 추가적인 소형선박 접안시설의 필요성이 대두된 완도항에 대하여 선박의 안전한 정박을 위한 정온수역 확보와 위한 최적의 평면 및 최신공법이 반영하여 완도항 유선 부두가 안전하게 건설할 수 있도록 기본 및 실시설계를 수행하는데 그 목적이 있음.

1.3 과업위치

전라남도 완도군 완도읍 군내리 완도항 일원

1.4 과업개요

(1) 기초자료조사 : 1식

(2) 현지조사 : 수심측량 2.05km, 지반조사(해상 5공) 및 시험 1식

(3) 완도한 유어선 부두 건설 기본 및 실시설계 : 1식

(2) 수치모형실험 : 1식

(3) 사전재해영향성검토 : 1식(필요시)

(4) 해역이용협의서 : 1식

(5) 성과품 작성 : 1식

1.5 과업수행기간

이 용역의 과업기간은 착수일로부터 8개월로 하고, 계약상대자는 다음의 경우에 발주기관장 또는 그 위임을 받은 자에게 서면으로 계약기간의 변경을 청구하여야 한다.

(1) 관계기관의 협의 및 검토가 관계기관의 사유로 지연되었을 때

(2) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

(3) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

(4) 발주기관의 방침변경 또는 지시에 의한 때

1.6 과업내용의 변경조건

(1) 계약상대자는 다음의 1)에 해당하는 때에는 용역감독자와 협의하여 변경을 요구할 수 있다.

1) 과업업무량 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때

2) 계약내용에 따른 이행수량에 의한 정산 변경시

3) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

4) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

5) 지자체 및 관계기관과의 협의, 발주기관의 계획이 변경된 때

6) 지층상태가 불규칙하여 변경이 불가피할 때

1.7 주요업무의 사전승인 등

계약상대자는 다음사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의를 하여 과업을 수행하여야 한다.

(1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

(2) 기본설계를 포함한 주요설계내용 및 방침의 설정 또는 변경

(3) 관계기관과의 협의사항

(4) 설계기준의 설정 또는 변경

(5) 기타 용역감독자의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

(6) 공공측량 계획

1.8 과업수행 및 공정보고

(1) 착수신고서

1) 계약상대자는 과업착수시 예정공정표, 사업책임기술자 선임신고서가 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출한다.

2) 계약상대자는 과업착수신고서 제출시 건설기술진흥법시행규칙 제27조(별지27호 서식)에 의거 설계 등 용역업자의 현황통보 및 관리를 위한 자료를 전산파일로 제출한다.

(2) 과업수행계획서

1) 계약상대자는 착수신고서 제출 후 현장여건 등을 검토한 후 과업수행계획서를 14일 이내 제출해야 하며, 이에 포함할 내용은 다음과 같다.

① 세부공정계획서

② 과업의 단계별 성과품 제출계획서

③ 과업수행조직 및 인력(장비)투입계획서

④ 건설기술 경력사항 확인서

⑤ 참여기술자 인적사항, 참여과업내용 및 참여예상기간

⑥ 참여기술자의 보안각서

2) 계약상대자는 상기 과업수행계획서 서류 2부를 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다.

(3) 월간 진도보고서(필요시)

계약상대자는 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 월간 진도보고서를 매월 말일을 기준으로 하여 다음달 7일까지 용역감독자에게 제출하여야 한다.

1) 과업 추진내용 및 공정현황

2) 각종 도서 수발 현황(승인사항 포함)

3) 과업수행상 주요 문제점 및 대책

4) 다음 달 과업수행 계획

(4) 각종보고

계약상대자는 용역감독자의 요구가 있거나, 다음 각 각의 경우에는 관련자료를 제출하고, 담당 분야별책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며, 용역감독자의 지시사항(서면지시 포함)에 대하여 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

1) 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

2) 중간보고 및 최종보고시

3) 주요 계획 및 방침의 설정과 변경시

(5) 용역보고회 개최

계약상대자는 「항만건설 용역관리지침」(해양수산부훈령 제150호, 2014.2.17) 제26조에 따라 용역착수 30일 이내 용역착수보고회를 개최하여야 하며, 용역과업 수행과정에서 용역중간보고회를 개최하고, 용역이 완료된 경우에는 용역최종보고회를 개최하여야 한다.

(6) 참여기술자 투입일수 기록(Time Sheets) 제출

계약상대자는 참여기술자의 투입일수에 대한 개인별기록을 월간 단위로 작성하여 분기별로 제출하되 분기 시작달의 10일까지 투입기록을 제출하여야 한다.

참여기술자별 투입기록(  월)

성      명 :       인

책임기술자 :       인

월/일	투입시간	휴일(야간) 근무시간	수행업무	비 고
1
.
..
30

1.9 용역감독 등

(1) 용역감독

발주기관은 이 과업을 수행함에 있어 “기본설계 등에 관한 세부시행기준”에 따라 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

1) 기술인력 동원현황

2) 실시설계보고서 작성현황 및 업무수행상태

3) 기타 확인에 필요한 사항

(2) 용역점검

발주기관은 설계품질 확인을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 용역감독자와 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

1.10 자료요구․질의 등

(1) 발주기관은 과업수행이 지연되지 않도록 발주기관에서 보유 또는 입수할 수 있는 과업관련 기초자료(정보)를 과업착수 후 빠른 시일내 무상으로 계약상대자에게 제공하여야 하며, 계약상대자는 추가로 관련자료를 발주기관에 요청할 수 있다.

(2) 계약상대자는 발주기관에 용역수행과 관련된 질의, 문제 등을 서면으로 제출할 수 있으며, 발주기관은 서면접수 후 14일 이내에 서면으로 회신한다.

1.11 계약상대자의 책임

(1) 계약상대자의 책임범위

1) 계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주기관의 수정 보완요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정 조치하여야 한다.

2) 계약상대자는 과업내용서의 업무 및 계약서에 명시된 계약조건을 성실히 이행하여야 하며, 과업과 관련된 중요한 모든 사항은 발주기관의 서면승인을 득한 후 시행하여야 한다.

3) 발주기관으로부터 계획변경 등으로 추가과업을 서면으로 요청받은 경우에는 계약상대자는 과업변경에 대한 제안서 검토서를 제출하여야 하며, 발주기관으로부터 추가 과업내용 및 비용에 대한 서면승인을 얻은 후 과업을 착수하여야 한다.

4) 계약상대자의 해당 용역업무를 수행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우 이의 배상을 담보하는 용역손해배상보험 또는 공제증서를 과업을 완료하기 전까지 발주기관에 제출하여야 한다.

(2) 문서의 기록비치

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

(3) 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

(4) 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

1.12 적용규정 및 설계기준

(1) 각종 규정 및 설계기준은 가장 최근의 자료를 적용하며, 관련규정 및 설계기준이 개정된 경우 동 관련규정 및 설계기준 등에서 규정하는 바에 따라 적용여부를 판단하고, 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다.

(2) 관련법령 및 기준에 대해 명기한다.

(3) 통계자료는 공신력 있는 정부기관, 지방자치단체, 기타 한국은행 등 공공기관의 자료를 활용하고 인용된 통계자료는 반드시 출처를 명시한다.

1.13 관계기관 협의 및 인‧허가

(1) 계약상대자가 작성할 인‧허가서류 종류와 기관 명기

(2) 관계기관과 협의(문화재조사, 수행하는 각종 환경영향평가, 농지 전용 등)시 특히 고려할 요소 명기

(3) 업무협의 내용 명기

(4) 협의가 미완료된 경우 추가협의가 필요한 사항을 별도의 양식으로 정리

1.14 설계자문 등

(1) 설계자문 및 결과의 반영

1) 설계자문은 발주기관의 설계자문 등 규정에 따라 시행하여야 하며, 전체 용역과업을 대상으로 하여야 한다.

2) 발주기관은 설계자문 시기, 내용 등 설계자문 등 계획을 설계자문 등 시행 15일 전까지 계약상대자에게 통보하여야 하며, 계약상대자는 효율적인 설계자문이 될 수 있도록 발주기관에 자문시행 7일 전까지 설계자문을 위한 자료를 제출하여야 한다.

3) 설계자문위원에게 지급되는 자문비 및 기타 자문에 소요되는 비용은 실비로 정산한다.

4) 계약상대자는 발주기관으로부터 통보 받은 설계자문 결과를 특별한 사유가 없는 한 설계에 반영하여야 한다.

(2) 설계의 경제성 등 검토

발주기관이 「건설기술진흥법」 제75조에 따라 시행하는 본 과업의 설계의 경제성 등 검토에 대하여 계약상대자는 성실한 자세로 검토를 받아야 하며, VE 제안내용에 대하여 검토결과를 발주기관에 보고하여 필요한 경우 수정보완 하여야 한다.

1.15 보안 및 비밀유지

(1) 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 발주기관에 필요한 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야 한다.

(2) 과업성과품 발간시 유의사항

계약상대자는 필요시 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 용역감독자와 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류․관리하여야 하고, 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 용역감독자와 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서 발간한다.

(3) 보안관리의 책임

계약상대자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

1.16 용어의 해석

과업내용서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 하며, 협의된 해석은 서면으로 작성한다.

1.17 용어의 사용 및 문장의 구성

(1) 성과품 작성에 사용하는 용어

1) 계약조건에서 정의, 사용한 용어

2) KS 등 표준규격에서 정의, 사용한 용어

3) 기술용어사전에서 정의, 사용한 용어

4) 정부제정 제기준 용어

5) 기타 국어사전에서 정의, 사용한 용어

(2) 성과품 작성에 사용하는 맞춤법

1) 한글 맞춤법(교육과학기술부)

2) 외래어 맞춤법(교육과학기술부)

3) 기본 외래어 용어집

(3) 성과품 작성에 사용하는 문장구성

1) 과업내용서에 사용하는 문장은 주어와 술어가 일치하여야 하고 목적어가 빠진 문구 사용 지양

2) 형용사, 부사는 문장의 연결이 확실히 되도록 사용

3) 누구나 쉽게 이해될 수 있도록 평이한 문장 사용

4) 의사전달이 명확하도록 간결하고 서술적․명령적 구술체 사용

(4) 성과품 작성에 사용하는 용어의 표현방법

1) 애매한 표현 배제

① “원칙적으로”, “대체로”, “충분한”, “관련○○”, 등의 애매한 표현을 최대한 배제

2) 주어의 명확화

① 주어, 서술어, 목적어를 명확히 구분하여 “누가”, “무엇을”, “어떻게”해야 하는지를 명확하게 기술

② “계약상대자는”, “용역감독자는” 등 주어 명시

3) 약어사용

① 가능한 약어를 사용하지 말 것

② 약어 사용이 필요한 경우 다음에 따른다.

- 건설업 분야에서 제정된 협약            - 사전에 수록되어 있는 약어

- KS규준 및 기타에서 사용되고 있는 일반적인 약어

- 규준 및 규격은 그 단체 및 기관 또는 제조회사에서 제정한 것

- 약어는 원 단어의 특성을 유지하는데 필요한 최소한의 문자 및 수로 구성

(5) 성과품 작성시 서술원칙

1) 문장내용은 간단명료하고 불필요한 낱말이나 구절은 피할 것

2) 계약상의 필요한 모든 사항을 서술하되 반복하지 말 것

3) 불가능한 사항은 규정하지 말 것

4) 긍정문으로 알기 쉽게 서술할 것

5) 정확한 문법으로 기재할 것

6) 예측보다는 직설적으로 서술할 것

7) 공법과 결과를 모두 기재하지 말 것

8) 모순된 항목은 배제할 것

9) 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 않도록 구두점을 사용할 것

10) 정확하고 통일된 용어를 사용할 것

11) KS 등과 같은 표준규격은 그 내용을 숙지한 후 인용할 것

12) 상투적인 표현의 반복사용이나 틀에 박힌 문구는 피할 것

1.18 용역수행자의 교체

(1) 이 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 용역감독자가 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단되는 경우, 그 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

(2) 이 과업에 참여하는 기술자 중 사업수행능력 평가시 참여토록 계획된 사업책임기술자와 분야별 책임기술자 등이 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 사전에 그와 동등 이상의 자격을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받은 후 즉시 교체한다.

1.19 설계도서 작성시 고려되어야 할 사항

(1) 시공 중 과업내용의 변경 및 공사비 증액의 최소화되도록 조사 및 설계

(2) 환경친화적 건설공사를 위한 공법의 적용

(3) 건설폐자재를 활용한 설계

(4) 발주기관과 시공자간의 클레임 발생이 최소화되도록 설계도서 작성

(5) 공사시방서에 시공상세도면의 목록 제시 및 작성비용 내역서 반영

(6) 설계에 적용 가능한 건설 신기술의 반영

(7) 공사시방서에 토석정보공유시스템(EIS)의 활용방안 제시

(8) 설계의 경제성(VE) 등 검토방안 제시

(9) 시설물의 내구성 및 유지관리성 등을 고려하여 설계

1.20 신기술의 도입

계약상대자는 건설기술진흥법 시행규칙 제40조 제1항 제5호에 따라 신기술과 기존 공법에 대하여 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등을 종합적으로 비교 분석 해당 건설공사에 적용할 수 있는지를 검토하여 설계보고서에 수록하고 동법 시행령 제34조 제3항에 따라 특별한 사유가 없는 한 신기술을 설계에 반영하여야 한다.

1.21 토석정보공유시스템의 활용

(1) 설계자는 순성토 및 사토 발생시 토석정보공유시스템(EIS)을 활용하여 경제적인 설계를 하여야 한다.

(2) 발주기관은 용역과업의 준공과 동시에 토석정보공유시스템(EIS)에 순성토 및 사토의 종류, 수량, 위치, 발생시기, 반입․반출계획 등을 등재하고, 공사 계약시까지 수정․보완 유지하여야 한다.

1.22 기타 사항

(1) 발주기관의 귀책사유로 과업이 지연되어 기간연장이 필요할 경우에는 이로 인해 발생하는 추가 비용은 발주기관이 부담한다.

(2) 공동 또는 분담이행방식으로 수행하는 과업으로서 계약상대자는 발주기관 요청에 의한 합동사무실을 운영하는 경우 발주기관이 지원하는 예산의 규모, 업무협의 효율성 등을 고려하여 합동사무실을 설치하여야 한다.

(3) 하도급에 관한 사항

1) 계약상대자는 본 설계용역을 다른 설계자에게 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 계약상대자가 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

① 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

② 토질조사와 이에 부수되는 시험 등의 작업

③ 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무(특별과업, 경관설계 등)

3) 계약상대자는 위항에서 규정하고 있는 하도급으로 처리할 수 있는 사항에 대하여 하도급을 하고자 할 경우 하도급 계획서를 제출하고 발주기관에게 승인을 받아야 한다.

4) 계약상대자는 도급 받은 용역에 관하여 하도급 계약을 체결한 경우에는 그 계약을 체결한 날로부터 30일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주기관에게 통지하고 발주기관은 하도급계약 적정성을 검토한 후 통보일로부터 30일 이내에 이를 변경 요구할 수 있다.

① 하도급계약을 체결할 용역의 범위

② 하도급 받을 용역업자와 참여기술자의 현황

③ 하도급 기간 및 하도급 금액(율) 등

5) 계약상대자는 용역의 일부를 하도급한 경우에도 본 설계용역에 관하여 발주기관에 대한 책임을 진다.

6) 발주기관은 과업내용의 변경이 발생한 경우에 설계금액의 변경사유와 내용을 하도급자에게 직접 통보하고, 계약상대자는 하도급 부분에 대하여 과업내용의 변경 등의 이유로 추가금액을 지급받은 경우에는 추가금액의 내용과 비율에 따라 하도급 금액을 증액하여야 하며, 감액을 받은 경우에는 그 내용과 비율에 따라 감액하여야 한다.

7) 계약상대자는 하도급 관련 업무 수행에 있어 하도급거래 공정화에 관한 법률 등 관계 법령에 규정하고 있는 사항을 준수하여야 한다.

2. 기본 및 실시설계

2.1 조사업무

2.1.1 관련계획 조사 및 검토

(1) 정부관련 부처 및 공공기관에서 발표한 최신자료를 조사하고 출처 및 조사기간을 명시하여야 한다.

(2) 기존의 참고문헌 및 자료는 현지조사 및 답사 전에 조사하여 현지조사 자료로 활용토록 하여야 한다.

2.1.2 현지조사 및 답사

(1) 기상, 해상, 지형, 지질 등의 자연조건, 수역이용 상황 등을 고려하여 현지조사계획을 하여야 한다.

(2) 현지답사를 하여 계획지역의 시설이용현황 등을 사전에 파악하여 현지조사계획 수립에 활용하도록 하여야 한다.

(3) 현지조사는 현지답사 결과를 토대로 조사계획을 수립하여 사전에 발주기관과 협의하여 시행한다.

2.1.3 해양자료조사

(1) 설계파고는 기존 용역보고서상의 설계파고와 현재 운영 중인 인근 파랑관측소의 파고자료 등을 활용한다.

(2) 기존의 인근 검조소에서 관측된 조석자료를 수집, 분석하여 조위를 검토한다.

(3) 대상수역 및 인근수역의 기존 조류자료를 수집․분석하여 대상 수역의 대표적인 조류방향 및 유속을 정리하고, 또 이를 시설물 배치계획 및 구조물 설계에 적용하여야 한다.

2.1.4 기존 항만현황조사

(1) 기존용역 혹은 기본계획시 조사된 항만현황조사의 내용을 검토하여 요약․정리하여야 한다. 단, 상황의 변동 등으로 조사내용의 수정이 필요하거나 부분적으로 재조사가 필요한 경우에는 부분조사를 실시하여야 한다.

(2) 계획대상의 항만의 연혁과 발전과정, 항계 등을 조사하여야 한다.

(3) 계획대상지구의 항만시설에 대하여 기본계획 용역시의 관련내용을 검토하여 다음 사항을 조사 정리하여야 한다.

- 외곽시설

2.1.5 기상자료조사

(1) 과거 30년간 기상자료를 수집, 다음 사항별로 정리, 분석하여 종합개발계획에 이용할 수 있도록 한다.

(2) 이상 정리된 자료 등을 토대로 하여 육상 및 해상작업 일수를 추정, 시공 계획시 적용할 수 있도록 제시한다.

2.1.6 수심 및 지형측량

(1) 계약상대자는 수행된 측량의 성과를 충분히 검토한 후 활용하도록 한다.

(2) 수심측량의 측심선 간격은 25m간격을 표준으로 하며, 시설의 특성 또는 암반 예상구역에는 측심간격을 조정하여 수심도를 작성한다.

(3) 수심측량은 멀티빔 사용을 원칙으로 하고, 장애물이나 측량선 진입이 곤란한 곳에는 육상 수준측량 또는 Lead측량을 실시하여야 한다.

(4) 측량범위는 대상지역 인근 및 배후도로 일대가 나타나도록 하되, 국립지리원의 기본삼각점을 이용, 삼각측량을 실시하여 조사구역내에 필요한 수의 보조삼각점을 설치하여야 한다.

(5) 설치된 보조삼각점을 이용하여 지형현황측량을 실시하여야 하며 국립해양조사원의 T.B.M을 조사구역의 제반 기준점에 연결하여 지형측량에 활용하며, 필요시 국립지리원의 B.M과 비교하여야 하고, 발주기관의 지시에 따라 표석을 설치하여 멸실되지 않도록 하여야 한다.

(6) 지형지물은 상세한 원도에 표시하여야 하며, 현지에 노출된 지장물, 그 규격 및 표고를 기록하여 평면도에 표시하여야 한다.

(7) 계획평면도 등에는 기존 시설물 및 신규 시설물의 위치의 곡부에 그 위치를 좌표로 명시하여야 한다.

2.1.7 지반조사 및 시험

(1) 지반조사 및 시험은 기존의 자료 등을 검토하여 이를 최대한 이용해서 경제적이고 효율적으로 실시하여야 하며, 검토 내용을 보고서에 수록하여야 한다. 또한 계획대상지역이나 그 인근지역에 대한 지반조사 자료가 있을 경우에는 이를 비교 활용하여야 한다.

(2) 지반조사는 발주기관에 제출한 세부조사시행계획서에 따라야 하며, 과업의 증감이 있을 경우에는 정산하여야 한다.

(3) 해상 보링조사의 위치는 발주기관이 평면도를 제시하였을 경우에는 이에 따라 실시하여야 하며, 제시된 평면도가 없을 경우에는 그 위치를 평면도에 표시하여 세부조사시행계획서 수립 전 발주기관과 협의 후 시행하여야 한다.

(4) 지반조사를 위한 시추공의 간격은 본 설계기준에 규정되어 있을 경우에는 이를 따라야 하되 그렇지 않을 경우에는 발주기관과 협의하여 결정하여야 하며, 협의시 다음의 배치기준을 참고하여야 한다.

1) 지층상태가 수평, 연직방향으로 비교적 균일한 경우

구 분		기준선 방향	기준선의 직각방향	비고
개략조사	넒은지역	300m ～ 500m	50m
	작은지역	50m ～ 100m	50m
정밀조사(실시설계)	정밀조사	50 ～ 100m	20 ～ 30m

2) 지층상태가 복잡한 경우

구 분	기준선 방향	기준선의 직각방향	비고
개략조사	50m 이하	20 ～ 30m
정밀조사(실시설계)	10m ～ 30m	10 ～ 20m

(5) 시추공의 위치 및 간격은 구조물의 중요도와 적용공법, 시설의 종류 등을 감안하여 합리적으로 결정하여야 한다.

(6) 시추조사의 위치 변경이나 시추 개소의 증감이 필요한 경우에는 발주기관과 사전 협의 후 승인을 받아 시행하여야 한다.

(7) 조사를 실시한 위치는 평면직각좌표로 시추조사성과도에 표시하여야 한다.

(8) 지층변화에 따른 시추심도의 변경 및 암반층의 시추심도는 구조물 기초설계에 필요한 심도 등을 고려하여 결정되어야 하므로 세부조사시행계획서에 이에 관한 내용이 포함되어야 하며 시추 중에 예측치 못했던 지층이 있는 경우에는 발주기관의 승인을 받은 후 시행하여야 한다.

(9) 자연시료채취는 채취 가능한 위치에 대하여 KS F 2317 규정에 의하고 샘플은 지반상태에 가장 알맞은 것을 사용하여야 한다.

(10) 사질지반에 대한 표준관입시험은 1.5m마다 1회씩 실시하는 것을 원칙으로 하되, 토성이 변할 때마다 시료를 채취 필요한 토질시험을 실시하여야 하며, 토질 특성상 표준관입시험이 불필요 하는 등 시험횟수의 조정이 필요하다고 인정될 경우에는 발주기관의 승인을 받은 후 시행하여야 한다.

(11) 채취된 시료에 대한 시험은 다음의 토질시험을 실시하되 공사재료원 등의 추가적인 시험은 발주기관의 승인을 받은 후 시행하여야 한다.

1) 함수비시험

2) 비중시험

3) 입도시험

4) 액성 및 소성한계시험

5) 공진주시험

6) 진동반복삼축압축시험 등

(12) 특히 점성토는 흐트러지지 않는 시료를 채취하여 흙의 전단강도시험과 압밀시험 등을 실시, 흙의 공학적 특성을 파악하여 구조물 기초설계에 차질이 없도록 하여야 한다.

(13) 지반조사의 결과는 토질주상도, 토질단면추정도, 지지층 심도분포도, 연약층 분포도, 토질시험 결과표, 토질분류도 및 구간별 연약지반 토질정수 분석자료 등으로 정리하여 지반조사보고서를 작성하여야 한다.

(14) 보링 및 원위치시험시에는 지정된 토질분야 기술자가 현장에 상주하여 조사에 임하여야 한다.

(15) 해양지질조사는 파랑과 조류의 영향을 받지 않는 시설 위에서 시행하여야 한다.

(16) 지반조사의 토질주상도, 각종 시험결과 성과물에는 토질분야 책임기술자의 서명 또는 날인을 받아 보고서를 작성하여야 한다.

(17) 지반조사 결과는 “지반조사성과 전산화 및 활용에 관한 지침(국토해양부 고시)”에 따라 ‘지반정보통합DB시스템에 입력하여야 한다.

2.1.8 지장물 및 구조물조사

(1) 본 업무는 사업에 영향을 받는 지장물 및 구조물에 대하여 구체적인 이전 방안 및 처리대책을 수립하는 것을 목적으로 한다.

(2) 과업대상지역 일대의 각종 지하매설물도를 작성하여야 한다.

(3) 과업대상지의 각종 지하 매설물의 이전이 필요한 경우에는 지장물 및 지하매설물 세부이설계획 항목에서 그 이설방안을 제시하여야 한다.

(4) 각종 지하 매설물도는 작성되어 있는 도면과 연계하여 도면으로 작성 제출되어야 한다.

(5) 조사항목은 다음과 같다.

1) 공공시설물

2) 전기 및 통신시설물

3) 가스, 송유관 등

4) 상․하수도 시설물 및 기존 구조물

5) 공유수면 점용․사용 현황

6) 기타 시설물

(6) 계획시설물 인근의 각종 구조물과 문화재를 비롯한 중요시설물에 대한 구조물조사를 한다.

2.1.9 재료원조사

(1) 항만공사용 재료원은 흙, 모래, 자갈, 석재원, 콘크리트 및 레미콘으로 구분하여 선정조건을 검토하고 발주기관과 협의하여 결정하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 토취장은 토사채취 가능여부, 매장량, 운반조건, 토지소유자 동의여부 등을 종합적으로 검토하고 골재원 선정 우선순위를 정하여 발주기관에 보고 하여야 한다.

(3) 석재원은 기초사석, 뒷채움사석, 피복석 등 규격별로 생산가능성, 채취가능량, 반입조건 등을 종합적으로 검토하고 우선순위를 정하여 발주기관에 보고 하여야 한다.

(4) 콘크리트 또는 레미콘이 사용될 경우는 기 조사된 인근 공장 등에 대하여 검토하고, 항만구조물의 내구성 향상을 위한 특수콘크리트 사용 결정시에는 이의 제조 및 품질확보 여건 등을 조사하여 이용 가능한 공장을 선정한다.

(5) 모든 재료원에 대해서는 공사중 민원사항의 발생이나 물량부족 등의 문제가 생기지 않도록 철저한 조사를 실시하여야 하며, 기타 조사사항은 다음과 같다.

- 소재지 및 소유지             - 가채량, 운반거리, 운반로의 상태

- 토사에 대한 토량 환산계수 산정을 위한 현장밀도시험 및 흐트러진 밀도시험 시행

- 석재의 경우 압축강도 확인

2.1.10 공사용 작업장 조사

(1) 본 공사 시행을 위한 작업장(적출장, 각종 블록 제작장 등) 소요규모를 판단하고, 인근에 작업장 이용 가능부지를 조사하여 필요시 신규 작업장 조성규모를 산정하여야 한다.

2.1.11 어업권 조사

(1) 관련 시․군에 등록된 어업권현황을 조사하여 사업시행으로 인해 영향을 받는 어업권의 현황을 파악한다.

2.1.12 용지조사(편입토지조사)

(1) 용지조사는 법적근거인 지적도, 임야도, 토지․임야대장, 등기부등본을 열람하고, 발급받아 면적과 소유자 관계인을 정확히 조사하여 용지 및 지장물 보상조서의 기초자료로 활용한다.

(2) 폐 부지현황을 조사한다.

(3) 점유되는 토지, 가옥 및 시설물 등의 보상에 필요한 자료를 조사한다.

2.2 계획업무

2.2.1 설계기준 작성

(1) 구조물별로 적용하여야 할 설계기준을 발췌하여 보고서에 수록하여야 하며, 당해 설계에서 적용한 주요설계기준은 이해관계자가 설계내용을 이해하기 쉽도록 보고서의 “설계기준”편에 별도로 정리하여야 한다.

(2) 당해 설계에서 결정한 설계조건은 항목별 분석방법, 분석내용 등 설계조건 결정과정에 대하여 체계적으로 정리하여 보고서에 수록하여야 한다.

(3) 당해 설계에서 적용한 법정 설계기준 이외의 적용된 외국의 설계기준이나 신공법 등에 관한 내용은 별도로 작성하여 부록에 수록하여야 한다.

2.2.2 평면배치계획

(1) 항내 수질오염의 개선을 위한 해수소통구의 설치규모, 위치 등의 계획을 수립하여야 한다.

(2) 방파제 계획 및 기존에 설치된 북방파제에 해수소통구의 적정규모 배치를 검토하여야 한다.

(3) 북 방파제 해수소통구는 항내 수질오염의 개선을 위한 해수소통구의 시설배치계획안은 최소한 3개 이상을 작성․검토하여야 하며 각 계획안에 대한 장단점을 분석․정리하고 항만의 기능면과 경제성, 기술적인 측면에서의 건설의 난이도 등을 종합․검토하여 최종계획안을 선정하여야 하며 최종안의 결정이유를 명확히 제시하여야 한다.

2.2.3 구조물 형식 결정

(1) 구조물 형식은 현장조사결과를 분석하여 설계조건을 결정하고 현장특성에 부합되는 최적의 구조형식을 3개안 이상 비교․검토하여 최적안을 선정하여야 한다. 또한 구조물별로 구조물의 안정성, 경제성, 시공성, 환경에 미치는 영향 등에 대해 종합적으로 검토하여야 한다.

2.2.4 관계기관 협의

(1) 전 단계과업에서 수렴된 이해당사자의 의견이 최대한 반영될 수 있도록 공사계획 및 공법을 결정하여 이해당사자와 사전에 협의하여 민원을 최소화할 수 있는 방안을 검토하도록 한다.

(2) 관계기관 협의내용은 문서로 보존되어야 한다.

2.3 설계업무

2.3.1 공통사항

(1) 구조물의 설계는 원칙적으로「항만 및 어항설계기준․해설(해양수산부, 2014)」에 의하며 항만공사표준시방서 및 항만공사 전문시방서 등을 참고한다.

(2) 구조계산 등에 컴퓨터 소프트웨어를 사용하였을 때에는 사용 소프트웨어 및 해석방법의 적합성에 대한 설명과 함께 입력 데이터, 출력내용, 제한조건 등을 상세히 수록하여야 한다.

(3) 구조물 설계시 내진설계 적용여부를 검토하여야 한다.

(4) 기초구조물 설계시에는 활동(원호활동 포함), 전도, 지지력 등을 검토하여야 하며, 구조계산서에는 검토과정을 알 수 있도록 상세히 수록하여야 한다.

(5) 구조물의 설계는 강도설계법 또는 한계상태설계법을 사용한다.

(6) 해양콘크리트 구조물의 내구성 향상을 위하여 고내구성 재료를 사용하여 설계하여야 한다.

(7) 신기술의 활용 등을 검토하여 건설공사의 설계에 반영여부를 결정하여야 한다.

(8) 본 항에 적용한 파랑은 공신력 있는 프로그램을 이용 산정하여야 하며 그 결정과정 등은 상세히 보고서에 수록되어야 한다.

(9) 중요 구조물의 설계는 각종 자료를 수집분석 검토하여 가장 경제적이고 내구성이 있는 안을 선정할 수 있도록 3개안 이상(합리적인 비교를 위하여 각각의 안은 그 자체로서 가장 경제적이고 안전한 최적의 안이 되어야 한다)을 선택하여 이에 대한 구조계산 및 공사비, 장단점, 기타 필요한 사항 등을 검토․작성하여 1개안을 선정하여야 한다. 다만, 검토안의 수는 공사의 규모 등에 따라 발주기관과 협의하여 조정할 수 있다.

(10) 사전 협의사항

계약상대자는 과업진행 중 다음과 같은 세부사항에 대하여 본 과업지시서의 다른 항목에 특별한 규정이 없더라도 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

① 구조물의 위치, 형식 및 규모

② 구조물의 표준단면(공사비 산정을 위한 단면 포함)

2.3.2 공법 및 단면검토

(1) 계약상대자는 과업대상시설을 경제적으로 건설하기 위해 관련공법에 대하여 최신공법을 포함한 국내의 여러 공법 등을 종합적으로 조사하여 그 장단점 및 시공조건, 시공사례 등을 검토․정리하여야 한다.

(2) 앞의 (1)항에 의거 조사․정리된 자료를 이용하여 대상시설 건설을 위한 주요공법을 발주기관과 협의하여 선정하되 주요공법 선정시에는 과업대상지역의 토질 및 지반조건, 수심 등 시공조건을 고려하여야 하며 공법선정의 객관적인 근거를 명확히 제시하여야 한다.

(3) 계약상대자는 기 축조된 구조물 단면을 종합적(안전성 검토 등)으로 조사․분석하여 경제적인 연결 시공방안 등을 제시하여야 한다.

(4) 공법선정 후 구조물의 표준단면을 결정하여야 하며 표준단면은 그 구조물 전체 단면을 대표할 수 있도록 적절하게 선정하여야 한다.

(5) 지반조건 등의 상이로 구간별 표준단면이 다를 경우에는 앞의 (5)항에 따라 이를 검토하고 보고서에 수록하여야 한다.

(6) 주요 구조물의 표준단면 또는 구간별 표준단면은 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

2.3.3 구조계산

(1) 주요공법의 비교 검토를 위한 각 공법의 대표단면 결정시에는 각 단면에 대한 구조계산을 하여 최적 단면을 선정하여야 하며, 이에 대한 판단의 근거를 설명하여야 한다.

(2) 구조계산의 내용은 체계적으로 요약하여 발주기관에서 쉽게 알 수 있도록 정리하여야 하며 구조계산에 사용된 설계조건, 변수 또는 패러미터(Parameter) 등을 명확히 보고서에 수록하여 그 내용을 알 수 있도록 하여야 한다.

2.3.4 외곽시설

(1) 완도항 중앙 방파제의 자연조건, 해상조건, 지반조건, 시공성 등을 검토하여 경제적이고 적합한 단면형식이 되도록 선정하여야 한다.

(2) 마루높이는 침하를 고려하여 결정하여야 하며, 항내 해수유통을 고려하되 항내정온에 미치는 영향이 최소가 되도록 하여야 한다.

(3) 최근 지구 온난화의 영향으로 인하여 지속적으로 강화되고 있는 태풍의 영향과 해수면 상승을 고려하여 설계조건을 결정하여야 하며, 그 결과를 반영하여 최적의 단면계획을 수립하여야 한다.

(4) 또한, 지역주민의 민원사항을 충분히 수렴하여 건설 중 민원발생이 최소화 되도록 공법 및 건설계획을 수립하여야 한다.

2.3.5 해수소통구 검토 (완도항 북방파제)

(1) 완도항은 생활하수 유입과 해수의 정체로 인하여 수질오염 및 악취관련 민원을 해소할 수 있는 최적의 해수소통구 계획을 수립하여야 한다.

(2) 해수소통구는 완도항의 자연조건, 해상조건, 지반조건, 시공성 등을 검토하여 경제적이고 적합한 단면형식이 되도록 선정하여야 하며, 수치모형실험을 통하여 그 최적안을 제시하여야 한다.

(3) 해수소통구설치는 항내수질 개선을 목적으로 하는 것이므로 이로 인하여 항내정온에 악영향이 발생되지 않도록 하여야 한다.

2.3.6 지장물 이설 설계(필요시)

(1) 이설비산출

사업에 저촉되거나, 이설이 필요한 시설은 해당기관과 협의하여 이설비를 산출공사비에 반영하여야 한다.

(2) 이설계획

이설계획은 지하매설 부서의 확인을 거쳐 이설가능여부 및 공사 착공 후 이설시기 등을 협의하여 그 결과를 설계도서에 반영하여야 하고, 이설에 필요한 기간을 공사기간에 삽입하여야 한다.

2.3.7 수치모형실험

(1) 기본사항

1) 최신의 해도와 수심성과 자료를 조사 분석하여 지형변화 양상을 검토한다.

2) 「항만 및 어항 설계기준․해설(해양수산부, 2019)」등 최근 설계파 추정자료를 검토․분석한 후 반영하여야 한다.

3) 수치모형실험에 필요한 해양자료는 기존자료 및 환경영향평가시의 해양자료를 수집하여 검토 활용하되 만족할만한 자료를 얻을 수 없을 경우 발주기관과 협의하여 필요한 해양조사를 실시한다.

4) 파랑변형실험(설계파), 항내정온도실험, 해수유동실험, 부유사 확산실험, 퇴적물이동실험은 기 수행된 수치모형실험 자료 및 제3차 전국 항만기본계획 등 용역 결과와 비교․ 분석하여 설계에 반영한다.

5) 수치모형실험의 항목은 발주기관의 감독자와 협의하여 결정하며, 필요시 발주기관과 협의하여 변경될 수 있다.

6) 수치모형실험의 결과는 해역이용협의 및 환경영향평가의 필요 자료를 제공하여야 한다.

(2) 파랑변형실험

1) 적용모델은 천수, 굴절, 회절, 반사, 쇄파 등 파랑의 천해 변형을 고려할 수 있는 모델을 사용한다.

2) 최근의 심해설계파를 비교․검토하여 계획대상 지점들의 파고, 파향, 주기 및 발생빈도 등을 결정한다.

3) 현지 지형 및 수심조건을 정확히 재현할 수 있도록 최신 수심도, 지형도를 이용하여 각격자의 수심도를 작성하여 모델에 반영한다.

4) 수치모형실험은 대상해역 주변 전체를 포함하는 광역과 상세역으로 나누어 수치실험을 수행하여 파랑의 전파특성을 정확히 재현하여야 한다.

5) 파랑조건으로는 50년 빈도파를 적용하며, 필요시 발주기관의 감독자와 협의하여 다른 빈도의 파랑조건에 대해서도 검토하여 한다.

6) 필요시 너울과 바람에 의한 영향도 동시에 반영하도록 한다.

(3) 항내 정온도 실험

1) 광역 파랑변형 수치모형 실험은 대상지역 전면의 심해역을 포함한 광역의 범위를 설정하여야 한다.

2) 상세역 파랑변형 수치모형 실험은 파의 회절, 굴절, 쇄파, 흐름간섭효과, 반사등의 영향을 고려할 수 있는 모델을 사용하여야 한다.

3) 실험영역 설정시 입사경계와 측면경계에서 급격한 파랑변형이 발생하지 않도록 주기 및 지형에 맞도록 고려하여야 한다.

4) 입사파랑의 제원은 설계파랑과 이상파랑, 평상파랑으로 구분하여 이용하여야 한다.

5) 광역 및 상세역 실험을 수행하여 가능한 격자범위 내에서 최소격자로 구성하여 실험을 수행하여야 한다.

6) 구조물 형식에 따른 반사, 투과 등을 재현 가능하도록 하여야 한다.

(4) 해수유동실험

1) 해수유동실험은 대상해역의 조류특성을 파악하고 퇴적물 이동 및 부유사확산실험의 기초자료로 제공하여야 한다.

2) 해수유동모형은 당 해역과 유사한 해양특성을 갖는 지역에 적용된 바 있으며 선진기술 보유국에서 신규 개발 또는 적용되고 있는 수치기법 및 이론의 적합성을 갖춘 3차원 연직적분 모형이나 이에 상응하는 모형을 사용하여야 한다.

3) 모형의 영역은 과업대상지역의 유동특성을 적절히 모의할 수 있는 적절한 경계로 설정하되 필요시 광역과 상세역으로 구분하도록 하여야 한다.

4) 모형의 격자망은 대상지역의 지형 및 구조물의 조건을 적절히 반영할 수 있도록 충분한 해상도를 갖는 격자로 구축하여야 한다.

5) 모형의 해안선 및 해저지형은 가장 최근의 해도, 수심도 및 지형도 등을 이용해 입력하여야 한다.

6) 실험에 필요한 제반 실험(물리)변수는 관측치 또는 이론적 방법으로 산정된 값을 부여하되 검정과정을 거쳐서 최종적으로 확정하도록 하여야 한다.

7) 실험조석조건은 대, 중, 소조기의 조류특성을 반영하기 위하여 최소한 주요 4대분조를 고려한 조건으로 하여야 한다.

8) 모형의 검증은 과업대상지의 조석 및 조류 관측치와 실험치의 비교에 의해 수행하며, 비교방법은 조위면 및 조위곡선 비교, 최강유속비교 등의 방법으로 검증하여야 한다.

(5) 부유사확산실험(환평자료 검토)

1) 모델은 흐름에 의한 오염물질의 시․공간적인 이동양상을 계산하는 최신의 모델 등을 이용하여 투하된 오염물질의 이동경로를 추적하여 공간적 농도분포를 산정한다.

2) 모델의 입력자료인 시․공간별 수위 및 유속은 해수유동 모델의 결과를 이용한다.

3) 공사계획에 따른 공종별 해상공사시 발생되는 부유사의 발생량을 산정하여, 공사 단계별 최대 부유사확산 범위를 예측하여야 한다.

4) 부유사확산 예측은 공사특성 등을 파악하여 확산 양상 예측을 수행하고, 악영향 발생시 저감방안을 제시(공사시 공사강도 저감 등) 한다.

5) 오탁방지막 설치 후의 부유사 확산량 및 범위를 평가하여 저감효과를 검토하여야 한다.

(6) 퇴적물이동실험(환평자료 검토)

1) 기존자료 및 기수행 수치모형실험결과를 바탕으로 대상해역의 퇴적 및 침식 특성을 파악하고 본 과업에 의한 변화를 예측하기 위하여 퇴적물이동 실험을 수행하여야 한다.

2) 모델은 대상해역의 퇴적환경을 고려하여 부유 퇴적물의 침전 및 재부유에 따른 해저면의 침식 및 퇴적량을 계산하는 최신의 퇴적물이동 모델을 사용한다.

3) 인근 기상관측소의 기상자료, 기타 유입원 자료, 한국해양연구원의 심해파 추산자료가 미치는 영향 등을 분석한 후 실험을 수행하며, 이를 연간 변화의 입력자료로 사용하여야 한다.

4) 유동조건은 보정 및 검정이 완료된 해수유동 실험결과의 유동장을 사용하여야 하며, 파랑조건은 계절별 파랑변형 실험을 수행한 후 그 결과를 입력자료로 사용하여야 한다.

5) 사업대상지 및 주변 항로 부근 등에서의 연간 침·퇴적량을 예측·평가하여야 한다.

(7) 해수교환 실험

1) 해황 변화에 따른 무작위 행보법(Random-walk)의 입자추적 또는 확산농도를 평가 할 수 있는 모형을 사용하여야 한다.

2) 항만의 평면배치 계획에 따른 해수유동 실험과 연계하여 수행하여야 한다.

3) 기본계획의 평면배치안에 따른 해수교환을 평가․예측하여 항만의 해수소통 능력을 검토하여야 한다.

4) 항만의 해수교환률 향상을 위한 대책안에 대한 실험을 수행하여 그 효과를 검토하여야 한다.

2.3.8 세부수량 및 공사비 산출

(1) 과업대상시설에 대한 세부적인 물량을 산출하고 공사비를 산정하여야 한다.

(2) 공사 착공 후 물량산정, 설계누락 등으로 인하여 총사업비가 증가되지 않도록 수량 및 공사비를 객관적이고 합리적으로 산출하도록 최대한 노력하여야 한다.

(3) 특히 지반조사 불철저로 인한 구조물의 심도 증가 또는 구조변경 사례발생으로 공사비 증가 및 공사지연이 되지 않도록 설계 하여야 한다.

2.3.9 건설계획 수립

(1) 연차별 건설계획 수립

본 과업지시서에 의해 수행된 공사의 연차별 건설계획을 투자우선순위 및 투자사업비 등을 고려, 발주기관과 협의하여 결정하고 이를 총사업비와 공종별로 정리하여야 한다.

(2) 시공계획 수립

1) 공사시공을 위한 시공계획을 수립하되 다음의 내용이 포함되어야 하며, 공정계획은 CPM기법(Critical Path Method)을 사용하여 수립하고 그 내용을 보고서에 수록하여야 한다.

- 자재 및 장비사용 계획                               - 공정계획

- 공사 작업장 확보계획(필요시)                         - 기타 시공시 특히 필요한 사항

2) 공사기간을 CPM으로 정확하게 산정하여 차후 공사시공자가 품질확보에 지장이 없도록 하여야 한다.

2.3.10 실적공사비 작성

(1) 실적공사비 축적을 위해 설계서, 설계예산서 등은 정부제정 산출기준과 실적공사비 및 표준품셈규정에 따라 발주기관과 협의하여 작성하여야 한다.

2.3.11 기타사항

(1) 유사한 시설물에 대한 설계예산서 또는 관련자료가 없는 경우에는 해당 공종의 전문시공업체나 제작자의 견적서를 기준하여 산출한다.

2.4 사전재해영향성 검토

(1) 항만개발로 인하여 발생 가능한 재해영향요인을 개발사업 시행이전에 예측‧분석하고 적절한 저감방안을 수립‧시행토록 하여야 한다.

(2) 사전재해영향성 검토는 「자연재해대책법」 시행령 제6조에 따라 공사 시행 전에 관계기관을 대상으로 협의토록하며 주요 검토사항은 다음과 같다.

1) 진입도로, 매립지 등 지구내 및 인근 지역의 지반 안정성 검토

2) 매립지를 이용하는 경우 지반침하, 압밀, 지진 및 지반진동 등 지반재해에 대한 검토 및 대책 수립

3) 개발사업 구간과 연결되는 주변지역 배수시설의 통수능력 검토

4) 해안과 직결되는 소하천, 배수로 등의 역류발생 검토 및 대책 수립

5) 설계파 및 설계 해면의 산출 등 연안구조물의 설계를 위해서 태풍모델을 바탕으로 태풍관측자료와 해상관측자료 종합 정밀 분석

6) 호안구조물 등의 침하방지를 위한 기술적 검토

2.5 해역이용협의

2.5.1 일반사항

(1) 본 과업의 범위는 사업시행으로 인한 해양환경현황을 조사․분석하고 해양환경에의 영향을 예측, 평가하여 악영향에 대한 저감방안 및 환경보전 대책을 수립하는데 있다.

(2) 해역이용협의 수행 과정상 필요한 현황조사항목에 대한 조사지점 및 필요횟수 등은 사전에 감독자와 협의하여 시행하여야 한다.

(3) 본 과업의 원활한 수행을 위하여 해양환경관련법령(해양환경관리법) 및 사업추진 관련 법령, 기타법령에 의한 제반사항을 충분히 검토하여야 한다.

(4) 해역이용협의완료 후 관계기관 자료 요구시 이에 협조하여야 한다.

(5) 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항이라도 해양환경관리법 등 관련법령의 규정 등에 의하여 필요하다고 인정하는 중요사항은 발주자와 협의하여 시행하여야 한다.

(6) 해역이용협의서는 본 사업으로 인한 전반적인 환경에 미치는 영향을 도출하여 환경보전대책을 수립할 수 있는 자료가 되도록 하여야 한다.

(7)  협의서 작성시 예측 평가한 해양환경의 질에 미치는 영향에 대하여는 일반인이 이해하기 용이하도록 저감대책의 시행전후로 구분하여 환경기준 및 기타 평가의 척도가 될 수 있는 자료 등과 비교 분석하여야 한다.

(8) 항목별 예측평가 및 저감방안에서 기재된 저감방안에 대하여 사업시행에 따른 저감방안을 총괄적으로 파악할 수 있도록 항목별로 정리하여야 한다.

(9) 사업의 시행에 따라 환경에 영향을 미칠 것으로 예상되는 사항 중 그 저감이 현실적으로 곤란한 사항에 대하여는 항목별로 구분하여 분석․기재하여야 한다.

2.5.2 세부과업 내용

(1) 과업수행 주요 내용

- 환경현황조사(해양물리, 해양수질, 해양퇴적물 및 해양생태계)

- 해역이용협의서 작성 및 협의

(2) 환경현황 조사

- 환경질

- 해양생태계

(3) 해역이용협의서 작성

1) 현황조사

- 사업시행지역과 사업시행에 따라 영향을 받을 지역의 환경을 조사분석하여 기술하되 지도, 사진 및 도표 등을 적절히 사용한다.

- 사업시행에 따라 현저하게 영향을 받을 분야에 중점을 두고 서술하고, 필요하지 않은 자료의 나열은 피한다.

- 각 항목별로 현황조사 일시, 지점, 분석방법 등을 제시한다.

- 개황조사 및 각 항목별 현황조사 내용이 다른 항목의 평가에 필요한 현황조사내용이 있는 경우에는 상호 연계하여 영향예측 및 평가에 활용한다.

2) 영향예측

- 사업시행으로 인하여 해양환경 및 자원에 미칠 모든 영향을 현재 및 당해사업이 시행되지 않을 경우의 미래의 환경에 비추어 과학적인 방법으로 예측․평가하여 기술하되 예측결과는 체계적이고 종합적인 방법으로 표현 제시한다.

- 사업이 환경영향요소별로 환경에 미칠 영향의 발생가능성, 정도, 시기 및 지역과 각 영향의 중요성을 기술한다. 특히, 간접적 영향과 장기적 영향을 소홀히 하여서는 아니 된다.

- 환경에 미칠 영향을 사전에 예측할 수 없는 경우에는 그 내용 및 사유를 명시하여야 하며, 이에 불구하고 사업이 시행될 경우의 환경상 위험부담 및 대책을 기술하여야 한다.

- 환경에 미칠 영향은 공사시와 공사후(운영시)로 구분하여 예측 평가한다.

- 각 예측항목에 대한 예측방법과 예측결과를 자세히 기술한다.

- 개발이 인접해서 누적적으로 이루어져왔거나 이루어지는 경우 누적효과를 검토한다.

3) 저감방안

- 현재의 기술적, 경제적 수준으로 실시 가능한 최선의 방안을 제시하여야 한다. 따라서 평가에 따른 구체적인 저감방안은 다음의 사항을 준수하여 현실성 있게 제시하여야 한다.

- 저감방안을 제시할 때에 저감방안에 대한 여러 가지 대안을 제시하고, 제시된 대안의 장․단점을 비교․분석한 후 이 중에서 적용할 최적안을 선정하여야 한다.

- 사업시행으로 인한 영향 예측시 설정한 환경목표치를 달성하기 위한 해양환경영향저감방안을 검토하고 실제로 어떤 대책을 강구하는 것이 가능한가를 제시한다.

- 실시가능한 것으로 인정된 환경영향의 저감방안을 환경인자별로 정리하고 그 효과, 안전, 기술, 비용, 주민 및 어민에 대한 설득성 등의 모든 사항에 대한 가능성을 검토함과 동시에 그 결과로 사업대상해역 및 그 주변지역에서 현 상황에 최선이라고 생각되는 대책을 도․표 등을 이용하여 기술․제시한다.

- 환경적으로 민감하거나 사회․경제적 가치가 있는 해역은 특히 그 저감대책의 수립에 유의하여야 한다.  즉, 법령상으로 규제지역의 인근지역에 대한 사업입지를 억제하고, 불가피한 경우 충분한 저감대책을 수립․제시한다.

- 영향의 저감방안 시행이 사업지역 관할 지방자치단체 또는 관련 국가기관 등 타 기관의 소관에 속하는 것일 때에는 당해 기관과 협의한 후 근거 서류를 첨부하여 제시하여야 한다.

- 수립된 저감대책에 대하여는 그 저감효과 분석을 실시하고 저감대책을 고려한 영향예측을 실시하여야 한다.

2.5.3 성과품 제출

- 도급자는 과업수행 과정중에 생산된 각종 조사연구 검토 결과를 정리하여 용역보고서를 작성 제출하여야 한다.

- 해역이용협의서 : 10부.(필요부수)

- 기타 인허가 서류 : 2부.(필요부수)

-  작성자료 CD : 1매.(필요매수)

3. 성과품 작성기준

3.1 성과품의 구분

(1) 기본 및 실시설계보고서

(2) 지질 및 지반조사보고서

(3) 구조계산서

(4) 설계예산서

(5) 실시설계도면

(6) 공사시방서

(7) 기타(부록, 수량산출서, 수치모형실험, 사전재해영향성검토, 해역이용협의, 각종 도서, CD, 기타 등 발주기관과 협의하여야 한다.)

3.2 성과품의 내용

(1) 보고서

1) 표지

2) 제출문(용역수행업체의 대표이사 명의)

3) 참가기술자(명단 및 인적사항, 업무내용)

4) 목차

5) 위치도(l/25,000～1/50,000)

6) 공사개요(목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행방법, 금액 등)

7) 조사

① 현지조사 및 답사

② 측량

③ 지반조사

④ 지장물․구조물조사(필요시)

⑤ 재료원조사

⑥ 용지조사

⑦ 기타

8) 계획

① 전 단계 성과검토

② 사전재해영향성 검토

③ 구조물형식

④ 설계기준 작성

⑤ 관계기관 협의

⑥ 기타

9) 상세설계(설계기준․조건, 토공, 용․배수공, 구조물공, 부대시설, 기타)

10) 사업비 분석

① 공사개요

② 공사비산출

③ 사업비분석

④ 용지 및 지장물보상비

11) 민원사항

12) 부록(각종 조사자료, 기술심의 및 자문사항, 업무협의 및 지시사항, 관계기관 협의자료 등)

(2) 지반조사보고서

1) 표지

2) 제출문(용역수행업체의 대표이사 명의)

3) 목차

4) 조사개요(목적, 범위, 기간, 장비 등)

5) 조사내용

① 조사위치 선정

② 조사방법(시추조사, 현장원위치시험, 실내시험, 물리탐사 등)

③ 토질 및 암석의 분류 및 기재방법

6) 조사결과

① 지형

② 시추조사 결과

③ 현장원위치시험 결과

④ 물리탐사 결과

⑤ 실내시험 결과

7) 성과분석

8) 부록

① 조사위치 및 지층단면도

② 주상도(시추조사, 핸드오가보링, 시험굴)

③ 시험성과(수압, 공내재하, 실내토질, 실내암석, 골재원시험 등)

(3) 구조계산서

1) 구조계산서

① 개요

② 구조계획도

③ 설계조건(구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건․물성치, 사용 Program, 설계기준 및 지침, 기타)

④ 구조계산(개요, 구조해석 방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 구조해석, 설계단면력, 단면응력 검토, 기초허용지지력 계산, 안정검토)

⑤ 내진설계

⑥ 가시설(개요, 구조해석 방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 설계단면력, 단면응력검토, 안정검토, 기타)

(4) 설계예산서

1) 설계설명서

① 공사목적

② 공사개요

③ 위치

④ 기간

⑤ 규모

⑥ 공사수량

⑦ 관급자재

⑧ 예정공정표

⑨ 기타

2) 설계내역서(설계내역서, 도급공사 원가계산서, 총괄내역서, 공종별 내역서, 일위대가 등)

3) 단가산출서(단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조견표 등)

4) 수량산출서

① 총괄 자재집계표

② 공종별 수량집계표

③ 공종별 자재집계표

④ 세부공종별 수량집계표

⑤ 세부공종별 산출근거

⑥ 기타

(5) 실시설계도면(견본도면 목록 참조)

1) 목차

2) 위치도(1/5,000～1/20,000)

3) 일반도(1/100～1/500 : 표준횡단면도, 토공횡단면도 등)

4) 종평면도(H=1/1,200～1/1,000, V=1/200․H=1/5,000, V=1/500 : 배수계획도, 배수 구조물 횡단면도, 가도계획도 등)

5) 평면도(1/600～1/1,200 : 가시설도, 가도계획도)

6) 종단면도(H=l/600, V=1/1,200․H=1/1,200, V=1/200 : 가시설도, 가도계획도)

7) 구조일반도‧구조도(1/50～1/200 : 일반구조물, 기초, 기타)

8) 가시설 개요도(1/50～1/200 : 가시설 개요도)

9) 부대시설도

※ 주요 단면 구조상세도(1/10～1/100) : 구조상세도면은 중요한 부분에 대해서 시공상세도 작성자에게 설계자의 의도를 표현하는 도면임(필요시 작성)

(6) 공사시방서

1) 총칙

2) 조사

3) 사석 및 고르기공사

4) 콘크리트공사

5) 부두포장공사

6) 항로표지공사

(7) 기타

해당 사항이 있을 경우 다음사항을 작성․제출하도록 한다.

1) 지적도 및 용지도

2) 용지 및 지장물보상조서

3) 사진첩(측량, 지반조사 현황)

4) 인․허가서류 및 도서

5) 시추조사의 코아박스는 일정기간 발주기관이 보관하도록 한다.

5.3 성과품 작성의 특기사항

(1) 보고서

1) 발주기관이 본 보고서를 요약한 요약보고서를 요구하는 경우에는 발주기관의 지시에 따라 소요 부수, 수록내용 등을 결정하여 제출한다.

2) 지반조사보고서는 별도로 작성하고 본 보고서에는 요약분을 수록하는 것을 원칙으로 하나 지반조사 내용이 적을 경우에는 발주기관과 협의 후 본 보고서의 한 항목으로 하고 시추주상도, 시험결과 등은 부록에 수록한다.

3) 건설기술심의 내용 및 자문, 업무협의 사항에 대한 조치결과는 부록에 수록한다.

4) 용역참여자의 실명관리를 위하여 용역에 참여한 관계공무원 및 용역기관의 담당자, 발주기관, 방침 승인기관(설계도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함한다.)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기록하며 설계실명관리를 위해 날인 또는 서명하여야 한다.

(2) 지반조사보고서

1) 지반조사보고서에는 조사개요, 조사항목, 조사위치, 조사방법, 조사내용, 각종시험 내용 및 결과, 시추주상도가 수록되어야 하며, 시험결과로 얻어지는 각종 지반의 물성치, 계획지역의 지반구성 상태 등이 포함되어야 한다.

(3) 구조계산

1) 구조계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 수록하여 손쉽게 검토할 수 있도록 한다.

2) 각종 계산에 사용한 전산프로그램(Program)명과 이를 이용하여 설계한 사항을 기재한다.

3) 국제적으로 공인된 구조계산용 범용프로그램이 아닌 경우에는 범용프로그램과 비교․결과를 제시하여 신뢰성을 검증할 수 있는 프로그램(Program)을 사용한다.

4) 전산프로그램(Program)을 사용하여 계산한 경우, 구조계산서에는 정확한 모든(Case별) 입력자료가 정리되어야 한다. 또한 그에 대한 출력자료 역시 정리되어 있어야 한다.(B.M.D, S.F.D 등)

5) 모든 전산프로그램(Program)의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 하고, 그 양이 과대한 경우에는 별책으로 작성하여 최소 소요부수를 제출한다. 그러나 정리된 형태로 입출력자료가 인쇄된 것은 본 구조계산서 해당 항목에 수록한다.

6) 구조계산서는 검토자와 작성자가 시설물별 적정여부를 확인한 후 서명한 내용을 첫 쪽(page)에 표기하여야 한다.

7) 구조계산시 주요 설계계수가 가정값인 경우에는 반드시 가정값임을 명시하도록 한다.

8) 구조 및 수리계산서의 단위는 SI단위계를 원칙으로 하며, 별도의 단위계 사용이 불가피할 경우 발주기관과 협의한 후 적용하여야 한다.

(4) 설계예산서

1) 설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서, 수량산출서로 구별하고 단가산출서, 수량산출서는 별책으로 작성한다.

2) 설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재하며, 총괄내역서에는 제경비 및 시공상세도면 작성, 추가 지반조사 비용이 포함되어야 한다.

3) 설계예산서 작성은 설계용역완료 30일전 해당 월을 기준으로 작성한다.

4) 노임기준은 당해 년도 시중 공사 노임단가(대한건설협회)를 기준한다.

5) 재료비는 「정부구매물자 가격정보」를 우선으로 하며 가격정보에 없는 재료는 2개 이상의 물가정보지를 참조하여 산출한다,

6) 공사비 산정은 당해 년도 「건설공사 표준품셈」또는 실적공사자료를 기준으로 한다,

7) 중기손료 작성시의 외환환율은 당해 년도 1월 2일 외환은행 전신환매도율을 기준으로 하나 외환환율의 변동이 클 경우는 발주기관과 협의 후 결정한다.

8) 공사비 산출을 위한 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주기관과 협의하여 1개 또는 2개 업체의 견적서를 기준한다.

9) 설계예산서는 회계예규 “원가계산에 의한 예정가격 작성준칙”에 의거 작성한다.

10) 수량산출서 작성시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

(5) 설계도면

1) 설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성한다.

2) 구조물 도면에는 설계방법(허용응력설계법 또는 강도설계법)에 대하여 표시하여야 한다,

3) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

4) 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계방법, 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요 설계조건과 시공시에 유의하여야 할 사항 등 해당 도면 공사내용에 대한 특기사항을 수록한다.

5) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

6) 설계도면에 개정(Revision)란을 만들어 시공시 도면의 History를 기록할 수 있도록 한다.

7) 설계도면은 KS A 0005(제도통칙)과 KS F 1001(토목제도통칙)에 따라 작성한다.

8) 도면 하단의 표제난의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

9) 주요 설계계수가 가정값인 경우 현장시공에 앞서 확인이 필요하면 도면 주석란에 이러한 사실을 명시하여야 한다.

10) 모든 도면은 CAD System을 이용하여 작성하되 “건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정” 제66조에 따라 단체표준으로 공고된 “건설CALS/EC 전자도면 작성표준”에 따라 작성한다.

11) 설계도면에 작성되는 단위는 S.I를 원칙으로 하며, 특수 단위가 필요할 때는 발주기관과 협의한 후 사용한다.

12) 도면의 맨 앞에는 전체 도면의 List를 작성하여 두도록 한다.

13) 설계도면은 견본도면 목록을 참고하여 작성하며, 목록 외의 도면이 필요한 경우에는 발주기관과 협의하여 결정한다.

(6) 공사시방서

1) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서 관련법규 등을 근간으로 발주기관 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항을 포함하여 작성하여야 한다.

① 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선순위, 설계도서 검사 의무 등에 관한 상세사항

② 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

④ 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

⑤ 계약상대자가 작성하여야 할 시공상세도 목록

⑥ 계약상대자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

⑦ 발주기관과 계약상대자 사이의 책임범위 및 한계

⑧ 각종검사, 기성지급, 과업내용의 변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

⑨ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

주요 공종별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

공사전반에 관한 주의사항 및 절차

기타 주요 공사사항

3) 공사시방서 작성시 유의사항

① 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단ㆍ명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

② 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

③ 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성 형식의 일관성을 유지하도록 한다.

④ 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

⑤ 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

⑥ 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

⑦ 공사기성에 관련된 사항을 이해가 명확하도록 한다

⑧ 발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 계약상대자, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

⑨ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

토석정보공유시스템(EIS)을 활용하여 공사시방서를 작성한다.

(7) 용지도 및 용지조서의 작성

1) 용지도는 지적기사 자격소지자가 용지도 작성 및 확인, 날인하여야 하며, 용지도상에는 도로부지경계선 및 중심선을 표시하고, 행정구역, 지번, 지목, 축척 등을 기입하고, 중요물건(가옥, 분묘, 전주, 지하매설물)을 표시한다.

2) 용지조서에는 지번, 지적, 지목, 소유자의 주소, 성명이 표시되어야 하며, 지적에는 당초 지적과 계획도로로 분할된 지적을 구분하여 작성한다.

3) 소유권이외의 권리(저당권, 지상권, 지역권 등)가 설정되어 있거나 예고등기, 가등기 등이 설정되어 있는 경우는 그 내용을 기입하고 공유물일 경우는 공유지분을 기입한다.

4) 지적도상의 토지 중 등기가 되어 있지 않거나, 토지대장에도 미등록된 토지는 소유자란에 별도 기재한다.

5) 용지조서 작성에 사용한 지적도, 임야도, 토지대장 등은 성과품 납품시 함께 제출한다,

(8) 보상대상 및 지장물조서의 작성

1) 과업용지내 보상대상 및 지장물은 종류별로 상세하게 조사 기입한다.

2) 보상대상 물건 및 지장물은 발주기관과 협의하여 그 범위 등을 결정한다.

(9) 기 타

1) 도면의 크기는 KS A 5201의 A0-A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

2) 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

3) 성과물은 “건설사업정보시스템(국토해양부 고시)”에 따라 ‘항만건설통합시스템’을 활용하여 관련문서 등을 발주기관에 제출하여야 한다.

4) CD-ROM의 File명 및 번호체계는 발주기관의 지침에 따른다.

5.4 성과품 제출

(1) 과업수행 과정 중에 생산되 각종, 조사, 연구, 검토 결과를 정리하여 보고서를 작성 제출하여야 하며 각종 설계도서를 아래와 같이 작성하는 것을 원칙으로 한다.

1) 기본 및 실시설계보고서 : 20부(협의부수)

3) 실시설계도서

① 공사설계예산내역서 및 공사시방서 : 10부

② 수량 및 단가산출서, 구조계산서 : 10부

③ 설계도면 : 10부(축소도면 A3 5부 포함)

4) 기 타

① 지형 및 수심측량 보고서(기본 및 실시설계 보고서에 합본 제출)

② 지반조사 보고서 :　10부

③ 수치모형실험 보고서 : 10부

④ 사전재해영향성검토서 : 10부

⑤ 해역이용협의서 : 10부(협의부수)

⑥ 각종 측량성과도 : 1식

⑦ 지반조사 결과시료 및 시료상자 : 1식

⑧ 사진첩 : 2부

⑨ CD : 2set

기타 이 과업수행으로 인하여 생산되는 각종 소프트웨어, 인허가 도서 등

Ⅲ. 예 정 공 정 표

예 정 공 정 표

구 분		단위	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	비고
1. 과업착수준비		1식
2. 현지조사		1식
3. 기본 및 실시설계		1식
4. 각종 인ㆍ허가 및 관계기관 협의		1식
5. 성과물 작성, 인쇄		1식
공 정	월 별	%	5	10	10	15	15	15	15	15
	누 계	%	5	15	25	40	55	70	85	100
보 고 회			착수 보고				중간 보고		설계 자문	최종 보고

Ⅳ. 설 계 예 산 내 역 서