서부권 시설물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역

설계서

2020.  02.

2020년 02월	조사자		설계자		심사자		팀장		과장
서부권 시설물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역 설계예산서 ◦ 용역 개요 및 대상시설 ․ 서부권 4개항(송공, 홍도, 진도, 땅끝항) 정밀안전점검 및 안전진단 ◦ 총 용역비 : 일금 사억구천오백육십육만칠천원정(495,667,000원) ․ 공급가액 : 일금 사억오천육십만육천원정(450,606,000원) ․ 부 가 세 : 일금 사천오백육만일천원정( 45,061,000원)

목      차

Ⅰ. 과업지시서

1. 개          요

2. 일  반  사  항

3. 세 부 시 행 지 침

4. 성 과 물 제 출

Ⅱ. 예정공정표

Ⅲ. 설계예산서

Ⅰ. 과 업 지 시 서

Ⅰ.과업지시서

1. 개 요

가. 과업목적

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 관련규정에 따라 과업대상 시설물에 대한 정밀점검 및 정밀안전진단 실시하여 효율적인 유지관리 및 보수보강공사를 실시하는데 활용함으로써 시설물의 내구연한 증진 및 재해예방.

나. 과업대상 시설물 : 항만시설에 대한 과업의 공간적 범위는 계류시설과 외곽시설, 항만기능시설의 경계까지 임.

항 별	시 설 물 명		구조형식	연 장(연면적)	상 면 폭(m)	수 심(m)	천단고(DL.(+),m)
송공항	계류시설	여객부두	경사식 물양장	150m	14.0	2.5	5.0
	외곽시설	방파제	중력식 방파제	150m	6.0	5.0	5.0
	외곽시설	방파호안	사석식 경사제	210m	14.0	1.0	5.0
	계류시설	차도선 부두	중력식	210m	14.0	3.0	5.0
	외곽시설	호안	사석식 경사제	385m	4.5	1.0	6.5
홍도항	계류시설	물양장	중력식	43m	11.7	1.0	7.7
	외곽시설	방파제	중력식	100m	10.0	15.0	3.9
	외곽시설	방파호안	사석식 경사제	100m	10.0	15.0	8.0
	계류시설	여객선 접안시설	중력식	100m	50.0	8.0	6.5
	계류시설	여객부두	중력식	60m	31.0	5.0	6.5
	기타	연도교(호안)	중력식	172m	10.0	5.0	6.5
	외곽시설	호안	사석식 경사제	22m	10.0	5.0	6.5
	건물	홍도 여객터미널	1동	50m	10.0	15.0	20.0
땅끝항	외곽시설	방파제	사석식 경사제	112m	10.0	1.5	5.5
	외곽시설	호안	사석식 경사제	260m	6.0	2.0	5.5
	계류시설	관리부두	직립식	64m	6.0	2.0	5.5
	계류시설	차도선 부두	직립식	55m	6.0	4.0	5.0
진도항	외곽시설	방파제	직립식	200m	10.0	4.0	5.5
	외곽시설	관리부두	직립식	70m	6.0	4.0	5.5
	외곽시설	차도선 부두	직립식	120m	6.0	4.0	5.0

○ 정밀점검 및 정밀 진단 사업(기타 기능시설인 부잔교 시설에 대해서는 점검하여 보고서에 수록 하여야 함.)

다. 과업범위

1) 정밀점검, 정밀안전진단, 수중조사를 위한 자료조사 및 계획수립

2) 현지조사

- 육안 및 장비를 이용하여 각 시설의 상태를 상세히 조사

- 계류시설, 교량, 등 시설의 특성에 따라 적합한 방법으로 조사

- 계류시설은 에이프런, 야적장 등 울타리까지 조사

3) 상태평가 및 분석

- 조사 대상 시설물별 상태 평가 및 분석

4) 보고서 작성

5) 정밀점검 및 정밀안전진단, 수중조사에서 발견된 시설물의 보수보강공사 실시설계

라. 용역기간

착수일로부터 6개월로 한다.

마. 시행방법

본 설계도서에 따라 도급으로 시행한다.

바. 설계변경조건

1) 과업범위 및 괴업내용의 증감이 있는 경우

2) 천재지변 기타 불가항력적인 사유로 변경이 불가피할 때

3) 기타 발주자가 필요하다고 인정할 때

2. 일반사항

가. 과업수행기준

1) 용역사는 최신의 전문기술지식을 활용하여 용역사로서 의무를 성실히 수행하여야 함은 물론 합리적인 용역성과가 되도록 하고, 본 용역 성과가 발주자에 최대 이익을 도모할 수 있도록 하여야 한다.

2) 과업수행은 본 설계서에 의하여 시행하여야 하며 착공 시 제출하는 사업수행계획서에 따라서 수행하고, 도급자는 임의로 과업을 축소나 조정ㆍ변경하여 수행할 수 없다

3) 본 용역은 국토부 및 해양수산부에서 제정․발행한 안전점검 및 정밀안전진단 지침과 항만시설물 안전점검 및 정밀안전진단 실시요령 등 객관적이고 공신력 있는 국내의 최신기준을 적용하여 수행하여야 하며, 그 인용부분 및 자료출처를 명확히 하여야 한다.

4) 안전점검, 정밀안전진단에 필요한 자료(설계도서, 지반보고서, 시험성적서 등) 등은 용역도급자가 발주처의 협조를 받아 조사․수집하여야한다.

5) 확보되지 않은 자료는 용역도급자가 직접 작성 및 시험 등을 통해 조사․수집하여 과업을 수행하여야 한다.

나. 참여건설기술자의 자격조건 및 참여규정

1) 사업책임기술자는 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제7조 제1항 별표2의 규정에 따른 기술 자격자 및 이와 동등이상의 학력․경력자로 국토부장관이 인정하는 항만분야의 정밀안전진단 교육을 이수한자

2) 분야별책임기술자는 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제11조 제1항 별표3의 기술인력의 등록요건 란에 규정된 자격요건을 갖춘 자로 국토부장관이 인정하는 항만분야의 정밀안전진단교육을 이수한자

3) 사업수행능력평가 대상자는 참여기술자로 반드시 본 용역에 참여하여야 하며, 참여기술자 중 그 임무를 수행함에 있어 부적당하다고 판단되거나, 태만하다고 감독자가 인정할 경우에는 해당자의 교체를 요구할 수 있으며, 해당자는 우리공사의 금후 용역에 참여를 제한할 수 있다.

4) 본 용역의 책임(사업, 분야별)기술자는 퇴직, 질병 등의 부득이한 사유 발생시 그와 동등 이상의 자격, 경력을 가진 자로 발주자의 승인에 따라서만 교체할 수 있으며, 과업지시서에 명시된 업무와 계약조건을 수행하기 위한 중요한 사항에 대하여 발주자와 협의하여야 한다.

5) 사업책임기술자는 현지조사시 감독원과 사전 협의된 양식 및 시간대에 작업일보를 전자방식(이메일, 팩스, 스마트폰 등)으로 송신하여야 한다. 동 작업일보에는 반드시 조사대상시설물, 전일과 당일의 책임기술자(사업, 분야별), 참여기술자, 현지보조원 및 수중조사원 명단이 명기되어야 한다.

다. 용어의 해석

과업지시서상의 문구, 용어의 해석과 과업의 범위에 대하여 발주자와 의견을 달리할 경우에는 발주자의 해석 및 지시에 따른다.

라. 과업의 제원

본 과업에서 사용할 제 조건이나 제원 등은 정부 제정기준이나 시험을 필한 근거가 확실한 것이라야 하며, 본 과업에 누락된 사항 및 용역사에서 수집한 자료는 발주자와 협의를 거쳐 적용한다.

마. 과업의 변경

1) 본 과업 수행 중 추가조사 등 과업량의 증감이 발생하는 경우와 발주자가 필요하다고 인정할 때.

2) 과업지시서에 누락되어도 과업수행에 필요한 경미한 사항은 도급자 부담으로 시행한다.

바. 과업수행에 따른 도급자의 책임

과업수행중 용역사의 잘못으로 발생되는 국가 또는 제3자에 대한 손해에 대해서는 용역사가 책임져야 하며, 과업완료 후라도 본 용역에 관련된 사항에 대한 재검토 또는 보완이 필요하여 발주자의 요청이 있을 때에는 별도의 비용청구 없이 수행하여야 한다.

사. 위반행위에 대한 조치

다음 행위가 발생하였을 때는 과업수행상 특별한 사유가 없는 한 계약위반 행위로 간주하여 관계규정에 따라 조치할 수 있다.

1) 제반 지시사항을 기한 내에 이행하지 않을 때

2) 계약기간 내에 완료할 능력이 없거나, 현저하게 공정이 미달될 때

3) 과업수행 중 성실하지 못하거나, 부주의로 과실이 인정될 때

4) 용역의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주었을 때

5) 현장조사 등 주요 과업수행시 책임기술자가 부재할 경우와 책임기술자 감독 없이 과업을 수행할 경우

아. 특허권 사용

본 용역수행에 있어 제3자 권리의 대상으로 되어있는 특허권 등을 사용할 때에는 용역사가 그 권리를 사용에 관한 일체의 책임을 져야한다.

자. 공정보고

1) 용역사는 과업착수 후 7일 이내에 과업수행계획서(과업수행방법, 인원투입계획, 월별예정공정표 등 포함)를 제출하여야 한다.

2) 공정은 매월 1개월 단위로 익월 10일까지 용역진도보고서를 제출하여야 한다.

3) 공정보고시 책임(사업, 조사 및 시험분야) 기술자의 현지조사 참여현황을 감독자의 확인을 받은 후 제출하여야 한다.

4) 감독원 요청시 참여기술자의 재직사항 관련자료(임금, 보험료 지급자료)를 포함하여 제출하여야 한다(개인정보에 관한 사항 제외)

차. 성과보고

1) 용역사는 발주자의 요구가 있을시 특별한 사유가 없는 한 사업 책임기술자가 과업수행 보고를 실시하여야 하며, 보고시기와 횟수는 감독자와 협의하여 결정하여야 한다.

2) 용역사는 현장조사 완료시 주요 손상부위 및 보수보강이 필요한 부위 등에 대해서는 현지조사 야장에 근거하여 감독자와 함께 확인하는 절차를 거쳐야 한다. 해상에서는 조사선박 철수전에 확인하여야 한다.

카. 성과품의 인쇄

과업지시서에 의한 모든 성과품의 원고가 작성되면 인쇄전에 감독자와 사전 협의하여야 하며, 각 도면에는 책임기술자의 서명 및 검토자의 검인필 확인이 있어야 한다.

타. 사진자료 작성

용역과업 수행사항을 사진 촬영하여 사진자료  작성 후 보고서에 포함작성 하며, CD-Rom, 이동식 저장장치(SSD등)와 함께 용역 완료시 제출하여야 한다.

파. 과업보완에 대한 의무이행

본 과업지시서에 누락된 사항(경미)이라도 본 용역 수행상 필요한 사항은 발주자의 지시에 따라 수행하여야 하고, 본 용역범위내 관련된 사항으로 당연히 재검토 및 보완이 필요할 때(용역완료후 포함)에는 별도 용역비의 청구 없이 재검토 및 보완하여 제출하여야 한다.

하. 성과품의 소유 및 보안사항

1) 용역수행으로 인하여 발생한 각종 조사 자료와 도면 및 원도 등 일체의 성과품은 발주자의 소유로 하고, 발주자의 승인 없이는 제 3자 에게 제공하거나 본 과업의 목적이외에 사용할 수 없으며, 준공 시 발주자에 정리하여 전량 제출하여야 한다. 다만, 발주자와 협의 후 타당한 사유가 인정될 경우에는 별도로 한다.

2) 본 과업과 관련된 자료 및 기록은 발주처의 승인 없이 타인에게 제공․대여할 수 없으며 도급자의 귀책사유로 인하여 자료가 외부로 유출되거나 보안사항 불이행 등으로 인한 문제시에는 법적, 도의적 모든 책임을 진다.

3) 수집된 자료 및 과업수행 결과는 철저한 관리와 보안을 유지하여야하며, 특별히 보안유지를 위하여 중요하다고 인정되는 서류, 자료 및 결과는 이의 누설, 분실, 도난을 방지하기 위하여 별도 보관함을 지정하고 보안관리 책임자(정,부)를 지정하여 관리토록 하며, 용역완료시 용역성과물에 대한 저장매체는 반납토록하고, 컴퓨터내 용역자료는 삭제토록 한다.

4) 보안 자료를 취급하는 용역 참여인원은 최소화(정규직원외 참여제한 원칙) 하며, 대표자 및 과업 참여기술자는 발주처에 보안각서를 제출하고 보안교육 등 보안조치를 강구토록 하며, 과업참여인원의 교체시 과업내용의 사전유출 방지와 인수인계를 철저히 하여야한다.

5) 과업수행을 위한 사무실은 별도로 지정하거나, 외부인이 출입할 수 없도록 통제시설(시건장치 등)을 설치하고, 과업수행과정에서 발생되는 성과물이 외부로 유출되지 않도록 소각 또는 파기대책을 수립하여야한다.

6) 도급자는 전체 과업수행 기간중 진행사항, 기술자 참여현황 등을 파악할 수 있도록 과업수행일지를 작성하여야 하며, 각종 회의자료, 중간보고서, 최종보고서 등은 필요한 부수만 발행하고 최종성과물은 발주자 승인없이 추가발행을 금지하여 보안관리에 철저를 기하여야 한다.

7) 용역사는 필요시 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 용역감독자와 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류․관리하여야 하고, 대외비로 분류되는 자료의 열람, 발간시는 용역감독자와 협의하여 열람하고, 지정된 발간업체에서 발간하여야 한다. 또한, 불량·파지 등은 반드시 소각할 수 있도록 파기대책을 수립하여야 한다.

8) 용역 시행중 발생되는 보안사항이나 상황 발생시에는 즉각 감독자에게 보고하고 지시에 따라야 한다.

3. 세부시행지침【안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토부)에 따라 시행】

3-1 정밀점검(계류시설)

가. 사전조사

이 단계의 조사는 자료조사와 현장답사의 순으로 진행되며 각 단계의 실시요령은 다음과 같다.

1) 자료조사

자료조사는 현장조사에 임하기 전에 대상시설물의 관련자료를 수집, 검토하고 다음단계의 현장답사 및 초기점검에 사용할 필요한 도면, 양식 등을 준비한다

가) 준공도면의 검토 : 구조계산서 및 특별시방서

나) 과거 점검기록 검토

다) 시설물 증․개축 및 유지보수 이력 검토

라) 과거의 기록사진 및 자료의 검토 : 준공이후의 제반시방서 및 설계기준 변경사항

마) 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침에 의한 해당시설물 표준점검표 작성

바) 보고서에 첨부할 대상시설물 도면 준비

2) 현장답사

현장 답사시에는 점검대상 시설물의 개괄적 현황을 파악하고 시설물 이용현황, 입지환경조성 및 외형 형상조사에 대한 점검을 행한다. 또한 시설물 사용자의 의견을 청취하고 다음의 현장 준비사항과 중점적으로 점검을 요하는 문제부위를 적출한다.

나. 현장준비

본 단계에서는 정밀점검을 원활히 실시하여 안전하게 소기의 목적을 달성할 수 있도록 도급자 부담으로 아래사항을 준비하여야 한다.

1) 중점점검 부위를 중심으로한 현장의 청소

2) 교통통제구역의 설정

3) 조사용 장비․기구의 준비

4) 안전에 필요한 장비 및 시설물의 설치

5) 점검 중의 안전관리대책 및 안전관리 인원 배치계획 수립

다. 점검 및 시험

1) 안벽

- 기 설치된 계측점 위치는 검정된 광파기를 이용하여 숙련된 기술자가 측정하여 좌표로 표시하고 전회에 측정한 자료와 전도, 침하, 슬라이딩을 비교 분석하여 보고서에 수록되어야 한다.

- 점검결과 정리 : 변위정도를 쉽게 판별할 수 있도록 도면을 작성 수록하여야 한다.

- 백태 및 철근부식과 동반된 균열, 박리, 파손의 조사

- 안벽 전면부 및 슬라브 구간의 철근노출, 조인트부 상태 확인조사

2) 레일 및 장비기초

- 기초콘크리트, 조인트, 레일하부 그라우팅 파손조사

- 접합철물 부식상태, Tie down 및 Pin cup의 부식, 변형, 체결 가능여부, 배수기능 여부, 트렌치내 이물질 현항 조사

3) 포장

- 육안점검시 공동이 추정되는 개소의 천공확인

- 침하량에 대한 종횡단 측량 및 면적측량

- 균열폭 크기 및 범위 조사, 조인트재 상태 조사

4) 악세사리 : 방충재(베이스 포함), 차막이, 계선주, 케이블 트렌치 및 급수관로 등 부대시설물의 상태조사

- 파손, 누수, 탈락 및 사용가능여부를 조사하고 보수가 필요한 시설은 전개소를 사진을 촬영하고 도면에 표시하여 제출한다.

5) 측구 및 맨홀, 배수박스(내부) : 구체, 조인트, 그레이팅 커버의 변형 및 파손상태, 토사매몰 상태 등 조사

6) 야적장 : 침하 및 포장손상 여부, 과하중 적치여부, 안전 저해요소 등 조사

라. 일반사항

1) 변형이나 균열, 열화 등 결함 부위에 대한 시험은 필요에 따라 적정장비 및 기구를 투입하여 정확히 실시하여야 한다.

2) 콘크리트 강도시험은 반발경도 시험결과 설계치에 미달되어 정밀조사가 필요한 경우에는 감독자와 협의한 후 코아를 채취하여 압축강도 시험을 실시하여야 한다.

3) 콘크리트 코아 채취를 한 부위는 복구방법을 제시하고 감독자의 승인을 득한 후 정밀하게 복구를 하여야 한다.

4) 결함의 표기는 국토부 “항만시설물 안전점검 및 정밀안전진단 실시요령”을 참조한다.

5) 포장 침하 및 파손확인 위한 수준측량은 격자형망(10m×10m)을 구성하여 측량한다.

마. 수중조사

1) 수중촬영시 위치확인이 가능하도록 표식을 설치하고, 파손상태 및 변형상태를 정확히 판별할 수 있도록 staff를 사용하여 촬영하여야 한다.

2) 파손부위는 길이, 폭, 깊이 등을 측정하고, 파손상태 및 원인분석을 실시하여 점검표에 기록하고 위치 및 내용을 도면상에 표시하여야 한다.

3) 중력식부두

- 피복석 및 기초사석의 상태조사(이탈, 침하)를 하여야 한다.

- 블록상태조사(이격, 단차, 파손 등)

- 케이슨 상태(간격, 침하, 파손) 및 기초 및 전면부 상태(세굴, 유실 등) 등 조사

4) 잔교식부두

- 강말뚝 및 배면 시트파일의 전기방식에 대한 전위측정과 방식의 성능유지 등에 대해 조사하여야한다

- 피복석 및 기초사석의 상태조사(이탈, 침하)를 하여야 한다.

5) 시설상태 사진 및 비디오 촬영(방충재 파손후 낙하물 존재여부 포함)

6) 수중조사의 단계별 조사범위는 다음과 같다.

○ 1단계 : 일반외관조사

○ 2단계 : 정밀외관조사(결함발생구간)

○ 3단계 : 필요한 비파괴검사(결함발생구간의 10%)

바. 상태평가 및 구조검토

1) 변위 등 발생원인 분석

시설 축조당시 설계조건 및 그 동안의 이용상황, 현재시설물 상태를 비교 분석하여 변형, 변위 등 결함 발생원인을 규명함으로써  향후 시설관리를 위한 자료로 활용하고 보수, 보강대책 수립의 근거로 활용하여야 한다.

2) 상태평가표 작성

- 상태평가는 국토부의 “안전점검 및 정밀안전진단 세부지침서”를 참조하여 작성한다.

- 상태평가는 구조부재별, 조사단위별, 조사대상 전체구조물의 상태평가를 실시

- 상태평가표 작성

3) 구조해석 (안전성 검토시)

① 당초 설계조건과 시설물의 상태조건을 정확히 조사, 면밀히 분석하여 구조적 안전에 대한 검토를 실시하여야 한다.

② 현지에서 조사된 하중조건과 실측된 구조부재의 단면크기가 구조설계내용과 일치하지 않을 경우에는 구조적 응력해석 등 내하력을 다시 계산하여야 한다.

사. 보수․보강방안 제시

1) 정밀점검 결과 보수, 보강이 필요하다고 인정되면 파손요인을 조사하여 보수․보강 주체(관리자, 사용자, 시공자)를 구분하고 안전성이 확보될 수 있는 보수, 보강 방안을 수립 제시하여야 한다.

2) 보수, 보강 방법 결정시에는 3가지(안) 이상을 제시하여야 하며, 각 특징, 시공성, 장․단점 등이 명시되어야 한다.

3) 보수, 보강 방법 수립시에는 국토부  “항만구조물 중력식 및 잔교식 안벽 및 외곽시설 보수․보강 표준 지침서” 등을 참조하여 최적의 방안이 제시되도록 개략공사비를 제시하여야 한다. (구조물 및 시멘트 포장 슬래브의 조인트 포함)

4) 보수, 보강시까지 기존시설물의 적절한 사용을 제시하여 구조물 손상이 확산되는 것을 방지할 수 있도록 하여야 한다.

5) 보수, 보강시의 우선순위를 부여하여 시급한 보수, 보강 구간을 제시하여야 한다.(방법, 시기, 부분별 보강순위 등)

6) 항만기본계획상 Port Renewal 대상 부두는 구조물 잔존수명 등을 감안하여 Port Renewal 사업시까지 부두기능유지 및 안전성 확보 가능한 범위내 보수 등의 적절한 보수․보강방법(취약부분 전체치환방안 포함)을 별도로 제시하여야 한다.

7) 과업대상부두의 방충재에 대한 상세한 상태조사, 선박접이안시 방충재와 관련 유의사항 파악, 방충재 보수방안을 제시하여야 하며 특히, 셀타입 방충재의 변형, 파손 등의 상태조사와 보수보강방안에 대해서는 전문가의 조력을 받아 제시하여야 한다.

8) 부두에는 당초 설계당시보다 선박이 대형화되어 가고 있으므로 선박 접이안 속도 및 방향, 견인줄의 계선주 견인실태를 조사하고 현재 접안중인 최대선박을 기준하여 방충재, 계선주 규격이 적정한지와 그 개선방안을 제시하여야 한다.

아. 수심측량

1) 수심측량은 수심지형측량을 실시하는 것으로 발주자가 이에 대한 평면도를 제시하였을 경우에는 이에 따라야 하며, 제시된 평면도가 없을 경우에는 감독자의 지시에 따르되 필요시 감독자와 협의하여 구역을 조정할 수 있다.

2) 측량은 측량선을 사용하여 수중 기초사석 및 피복석의 유실량을 파악할 수 있도록 하여야 하며, 측량 완료 후 유실량 산출자료를 제출하여야 한다.

3) 수심측량은 사전에 시행계획을 수립하여 감독자와 협의하여 시행하여야 하며, 과업의 증감이 있을 경우에는 정산할 수 있다.

3-2 정밀점검(구조물)

가. 자료수집․분석 및 현장조사

1) 대상시설물의 이력사항과 변형상태 조사 분석평가

2) 대상시설물 관리부서의 안전점검 자료 및 관련 자료를 수집하고 미흡부분에 대하여는 현장 상세점검을 통하여 시설물의 안전상태            변화추이를 분석한다.

3) 감독자는 준공도서, 유지관리 등의 자료를 도급자에게 지원하며, 필요한 사항에 대하여 협조한다.

4) 현장조사는 “별표1”에서 정한 항목을 기준으로 세부지침에 따라 구조물의 종류에 따라 조사하여야한다.

나. 시설물의 내구성조사

1) 구조물의 품질상태 및 내구성조사에 필요한 조사항목 및 조사계획은 감독자와 사전협의 후 시행하여야 한다.

2) 비파괴 현장시험 및 평가는 그 분야에 경험이 있는 자에 의하여 해석되고 평가되어야 하며, 이전에 같은 시험이 실시된 경우에는            그 성과를 분석하여 시험결과를 판단하여야 한다.

3) 외관조사는 설계도서, 과거보수이력 조사, 관계자의 의견 등을 수렴 검토한 후 손상상태(균열, 박리, 백화현상, 철근노출, 파손 등)            및 교각, 교대 부등침하 등 변위상태를 조사하여야 한다.

4) 각종 측정 장비는 공인기관 검정에 합격된 기기를 선정하여야 한다.

5) 각종 조사를 위한 현장측정 지점은 작업종료 후 원상복구 하여야한다

다. 시설물의 상태평가

1) 외관조사 및 비파괴시험, 각종 관련 조사 자료를 종합 검토하여 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태등급에 대한 소견을 제시            하여야 한다.

2) 주요 시설물의 결함부위에 대한 결함원인을 분석하여야 한다.

라. 시설물의 효율적인 유지관리 방안제시

시설물의 기능을 유지할 수 있도록 특성에 맞는 효율적인 유지관리 방안을 제시하여야 한다.

마. 시설물의 보수․보강대상 및 공법제시

1) 조사방법 및 진단방법을 명기하고 대상시설물에 대한 보수․보강공법, 우선순위 등을 포함하여 개략도면을 작성․제출하여야한다.

2) 구조물의 결함부위(조인트재 포함)에 대하여 상세한 보수․보강대책을 제시하여야 한다.

3) 구조물 결함에 있어 원인을 정밀 조사하여 보고하고 대책을 제시할 때는 기능과 미관이 고려된 공법을 제시하여야 한다.(사용사례 제시)

4) 교통량 증가에 따른 교량의 등급을 정하고 이에 맞는 보수․보강공법을 제시하여야 한다.

바. 과업시행 적용기준

1) 시설물의 안전관리에 관한 특별법령

2) 교량의 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토부)

3) 도로교 및 콘크리트 표준시방서(국토부)

4) 토목공사 일반표준시방서(국토부)

3-3 정밀안전진단

가. 사전조사

이 단계의 조사는 자료조사와 현장답사의 순으로 진행되며 각 단계의 실시요령은 다음과 같다.

1) 자료조사

자료조사는 현장조사에 임하기 전에 대상시설물의 관련자료를 수집, 검토하고 다음단계의 현장답사 및 초기점검에 사용할 필요한 도면, 양식 등을 준비한다

가) 준공도면의 검토

- 구조계산서 및 특별시방서

나) 과거점검기록 검토

다) 시설물 증․개축 및 유지보수 이력 검토

라) 과거의 기록사진 및 자료의 검토

- 준공이후의 제반시방서 및 설계기준 변경사항

마) 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침에 의한 해당시설물 표준점검표 작성

바) 보고서에 첨부할 대상시설물 도면 준비

2) 현장답사

현장답사시에는 점검대상 시설물의 개괄적 현황을 파악하고 시설물 이용현황, 입지환경조성 및 외형 형상조사에 대한 점검을 행한다. 또한 시설물 사용자의 의견을 청취하고 다음의 현장 준비사항과 중점적으로 점검을 요하는 문제부위를 적출한다.

나. 현장준비

본 단계에서는 안전점검을 원활히 실시하여 안전하게 소기의 목적을 달성할 수 있도록 도급자 부담으로 아래사항을 준비하여야 한다.

1) 중점점검 부위를 중심으로한 현장의 청소

2) 교통통제구역의 설정

3) 조사용 장비․기구의 준비

4) 안전에 필요한 장비 및 시설물의 설치

다. 정밀안전진단 및 시험

1) 해당시설물의 실측을 실시하고, 설계도서를 비교하여 구조물의 변형, 변위상태를 조사하여야 한다.

- 기존설계도면과 현장조사 결과가 상이한 경우 실제 시설되어 있는 구조대로 도면을 작성 제출하여야 한다.

2) 이격이 과다한 개소는 감독원과 협의하여 추가로 계측점을 설치하여 지속적으로 검토할 수 있도록 조치한다.

3) 기 설치된 계측점을 측정하여 전도, 침하, 슬라이딩 여부를 검토한다.

4) 콘크리트 균열, 누수, 박리, 층분리, 백태, 철근노출조사, 노면상태조사, 육안변형조사, 강재균열 및 부식상태조사, 도장상태조사 등을 조사하여야 한다.

5) 보수 필요성이 있는 모든 휨 및 균열에 대한 전수조사

6) 포장층 하부의 공동확인을 위하여 지층탐지를 실시하고 공동이 확인되면 천공하여 크기를 측정한다.

7) 방충재, 차막이, 계선주, 케이블 트렌치 및 급수관로 등 부대시설물의 상태조사

8) 측구의 구체, grating cover의 변형 및 파손, 준설의 필요성 조사

9) 한국시설안전공단에서 제정한 “강재 비파괴검사기준”에 준하여 시행하되 물량증감은 상호 협의후 시행한다.

10) 변형이나 균열, 열화 등 결함 부위에 대한 시험은 필요에 따라 적정장비 및 기구를 투입하여 정확히 실시하여야 한다.

11) 콘크리트 강도시험은 반발경도 시험결과 설계치에 미달되어 정밀조사가 필요한 경우에는 감독원과 협의한 후 코아를 채취하여 압축강도 시험을 실시하여야 한다.

12) 콘크리트코아 채취를 한 부위는 복구방법을 제시하고 감독원의 승인을 득한후 정밀하게 복구를 하여야 한다.

13) 결함의 표기는 국토부 “항만구조물 안전점검 및 정밀안전진단 실시요령”를 참조한다.

14) 포장 침하 및 파손확인 위한 수준측량은 격자형망을 구성하여 측량한다.

라. 수중조사

1) 수중촬영시 위치확인이 가능하도록 표식을 설치하고, 파손상태 및 변형상태를 정확히 판별할 수 있도록 Staff를 사용하여 촬영

2) 파손부위는 길이, 폭, 깊이 등을 측정하고, 파손상태 및 원인분석을 실시하여 점검표에 기록하고 위치 및 내용을 도면상에 표시

3) 잔교식부두

- 피복석 및 기초사석의 상태조사(이탈, 침하)를 하여야 한다.

- P.C 파일조사(변형, 균열, 파손 등)를 하여야 한다.

- 전기방식에 대한 전위측정 방식의 성능유지 등에 대해 조사하여야한다.

4) 시설상태 사진 및 비디오 촬영

5) 수중조사의 단계별 조사범위는 다음과 같다.

◦ 1단계 : 일반외관조사

◦ 2단계 : 정밀외관조사(결함발생구간)

◦ 3단계 : 필요한 비파괴검사(결함 발생구간의 10%)

마. 시 험

정밀안전진단시에는 수상부 및 수중부에 대하여 필요시 비파괴시험, 화학시험 및 부분파괴시험을 실시한다. 시험을 통하여 분석된 평가결과는 구조물의 안전성 및 사용성 평가에 사용하고 보수 설계에 적용하여야 한다.

바. 상태평가

정밀외관 조사결과를 이용하여 상태평가방법에 준하여 구조물의 상태평가를 실시한다.

1) 상태평가표 작성

- 상태평가는 국토해양부의 “안전점검 및 정밀안전진단 세부지침서”를 참조하여 작성한다.

- 상태평가는 구조부재별, 조사단위별, 조사대상 전체구조물의 상태평가를 실시

- 상태평가표 작성

사. 안전성 평가

1) 조사, 시험, 측정 결과의 분석

2) 기존의 구조계산서 또는 안전성평가 자료 검토․분석

3) 구조 안전성평가

4) 시설물의 안전성평가 결과에 대한 소견

아. 보수․보강 방안 제시

1) 정밀안전진단 결과 보수, 보강이 필요하다고 인정되면 파손요인을 조사하여 보수․보강 주체(관리자, 사용자, 시공자)를 구분하고 안전성이 확보될 수 있는 보수, 보강 방안을 수립 제시하여야 한다.

※ Renewal 대상부두의 보수보강은 Renewal 계획과 관계없이 노후로 인한 기능저하 등으로 보수보강이 필요한 시설에 대해서는 반드시 보수보강방안(취약부분 전체치환방안 포함)을 수립하되, Renewal시까지 최소한으로 부두기능유지 및 안전성이 확보 가능한 범위로 제한적 보수보강방법을 별도 검토한다.

2) 보수, 보강 방법 결정시에는 공법을 비교 분석하고, 각 특징, 시공성, 장․단점 등이 명시되어야 한다.

3) 보수, 보강 방법 수립시에는 국토부  “항만구조물 중력식 및 잔교식 안벽 및 외곽시설 보수․보강 표준 지침서”를 참조하여 최적의 방안을 제시되도록 개략공사비를 제출하여야 한다.

4) 보수, 보강시까지 기존시설물의 적절한 사용을 제시하여 구조물 손상이 확산되는 것을 방지할 수 있도록 하여야 한다.

5) 보수, 보강시의 우선순위를 부여하여 시급한 보수, 보강 구간을 제시하여야 한다.(방법, 시기, 부분별 보강순위 등)

자. 시험

○ 국토부 고시 “정밀점검 및 정밀안전진단 세부지침”에 따라 시행한다.

3-4 보고서 작성(제출할 보고서에서는 다음 사항들은 반드시 포함되어야 함)

가. 서두

․ 제출문

․ 참여 기술자 명단

․ 시설물 위치도

․ 시설물 전경사진

․ 점검 실시결과 요약문

․ 보고서 목차

나. 점검의 개요(점검의 범위와 과업의 내용등 점검계획 및 실시와 관련된 주요사항)

․ 점검의 목적

․ 시설물의 개요 및 이력사항

․ 점검의 범위 및 과업내용

․ 사용장비 및 기기

․ 점검 수행일정

다. 시설물의 상태평가(과업내용에 의거 실시한 조사, 시험 및 측정의 결과 분석과 시설물 상태평가결과를 작성)

․ 주요 부재별 외관조사 결과분석

․ 측정결과와 재료시험결과의 분석

․ 주요 부재별 상태평가 및 요약

․ 보수보강의 우선순위 결정

․ 보수대상 시설물의 구체적 보수공법 및 계략공사비 산출

라. 시설물의 안정성평가

․ 구조물의 안정성평가

마. 종합결론 및 건의

․ 점검결과의 종합결론

․ 정밀안전진단실시 및 시설물 사용제한의 필요성 여부

․ 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

․ 기타 필요한 사항

바. 부록

․ 육안검사사진           ․ 외관조사망도

․ 측정, 시험성과표        ․ 기타 참고자료

4. 성과물 제출

1) 용역보고서

- 보고서

․종합보고서 : 각 안전점검 종류별로 10부, 합본 5부

․개별보고서 각 5부

- 전산자료 : 1식

․ 보고서 : 한글(hwp)

․ 도  면 : Auto Cad

2) 실시설계도서

- 설 계 서 : 5부 (EST 적산프로그램)

- 설계도면 : 5부 (A3)

- 전산자료 : 1식

Ⅱ. 예 정 공 정 표

□ 예정공정표

월 별 공 종	착수1개월	착수2개월	착수3개월	착수4개월	착수5개월	착수6개월
1. 사전 및 현지조사
2. 점검, 분석, 평가
3. 보고서 작성
공정(%)	15	20	20	25	15	15
누계공정(%)	15	35	55	70	85	100

Ⅲ. 설 계 예 산 서