무안국제공항 현황

기본현황(2020. 2. 11. 현재)

❍ 공항시설 : 활주로 2,800×45m(연 14만회), 청사 29,106㎡(연 510만명)

❍ 운항노선 : 18→ 13개 노선(국내선* 1, 국제선 12)   * 제주

- 정  기(5) : 다낭, 방콕, 타이베이, 세부, 코타키나발루,  * (상해, 장가계, 산야)임시중단

- 부정기(7) : 나트랑, 달랏, 칼리보, 클락, 씨엠립, 비엔티안, 괌   * (하노이, 치앙마이)중단․취소

이용객→ 2020년 110만 목표

❍ 2019년 : 895천명(2018년 比 64.8%↑, 국제선 110.5%↑) * 상승률 전국 1위

❍ 2020년(1월) :  76천명(2018년 比 14.2%↓, 국제선   2.9%↓)

구 분	합계	′07년	′08년	′09년	′10년	′11년	′12년	′13년	′14년	′15년	′16년	′17년	′18년	′19년
여객 (천명)	3,171	15	130	58	100	91	96	133	178	312	322	298	543	895
운 항 (편)	25,923	224	1,841	1,032	1,058	875	923	1,237	1,499	2,355	2,330	2,146	3,818	6,585

개항배경 및 추진상황

❍ 목포공항 아시아나 항공기 추락사고	: 1993.  7. 2

- 해남군 화원면 마산리 야산, 탑승인원 106명(사망 66명)

❍ 무안국제공항 기본계획 고시	: 1998. 12. 16.

❍ 공사계약 및 착공(3,056억원)	: 1999. 12. 28.

❍ 목포공항 폐쇄	: 2007. 10. 23.

❍ 무안국제공항 개항	: 2007. 11.  8.

❍ 광주공항 국제선 이전	: 2008.  5. 29.

❍ 호남고속철도 2단계 경유 확정(2025 개통 예정)	: 2018.  8.

❍ (광주, 전남, 무안) 광주공항 이전 MOU 체결	: 2018. 8. 20.

- 광주민간공항 2021년까지 이전 통합

❍ 기반시설 및 편의시설 확충 추진 중	: 2019.~

- 활주로 연장(2,800→ 3,200m), 주차장, 여객청사 리모델링 등 743억원

참고		무안국제공항 기반․편의시설 확충계획

기반시설

❍ 활주로 연장 : 2,800→ 3,200m, 354억원            * 2020년 20억원

- 기본설계(~2020. 8.), 실시설계(2020. 9.~2021. 9.), 착공(2021. 10.~)

* 기본설계 착수(2019.4.) 후 관계기관 협의 과정(2019.12.)에서 전략환경, 사전재해 추가 이행 요구

- 지방도 815호선 일부 편입(500m)→ 이설 협의(지하차도 또는 우회)

편의시설→ 389억원

❍ CIQ 통합관사 신축 : 연면적 1,208㎡(50세대), 68억원(2020년 20)

- 무안 군유지 무상사용 협의 중(무안읍, 현경면, 청계면 등)  * 11기관 105명

- 기본 및 실시설계 추진(2020.6.~12.), 착공(2021.2~)

❍ 여객청사 : 증축 630㎡, 리모델링 3,438㎡, 134억원

- 2019년 완료 : 환승시설(차단막), 공용체크인카운터(20→ 32개소)   * 4.4억원

- 셀프체크인 설치 : 6개소       * 2021년 광주민간공항 통합과 동시에 설치

- 면세점 확장(110.76→ 237㎡)           * CIQ 기관 재배치와 병행 확장

	【 여객청사 재배치 계획 】
‣ 국토교통부, 공항공사, 특경대 등(2층)→ 관리동* 신축 후 이전 * 연면적 4,032㎡(지상 3층/지하 1층), 93억원(2020년 35), 착공(2020.3.) ‣ CIQ 기관 1→ 2층으로 이동 ‣ 1층은 수화물처리벨트 증설(1→ 2기)

❍ 주차장 증축 : 1,871→ 3,631면, 40억원(2020년 5)

- 실시설계(2020. 1.~ 12,), 착공(2021. 1.)

❍ 장비고 신축 : 연면적 1,560㎡, 리모델링 900㎡, 54억(2020년 3)

- 실시설계(2020. 1.∼ 12.), 착공(2021. 1.)